Сведения
о застройщиках и объектах капитального строительства, строительство которых осуществляются с привлечением денежных средств участников долевого строительства
по состоянию на 30 июня 2025 года (по сведениям, представленным застройщиками в ГИ ЗК).
	
№ п/п	Наименование застройщика Ф.И.О. руководителя	Реквизиты юр.адрес, ИНН,   контактный
телефон	Наименование объекта стр-ва, адрес	Правоустанавливающие документы на земельный участок (наименование документа, дата, №, дата гос.регистрации срок действия)	Разрешение на строительство (дата, №, срок действия)	Проектная декларация, место, дата 
размещения	Срок ввода объекта	Состояние объекта	Кол-во сам-ных частей (по проекту)
/
 кол-во ДДУ	Объекты, строительство которых ранее осуществлял застройщик	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ООО Специализированный застройщик «Радченко»
Прищепова Наталья 
Михайловна	г. Чита, ул. Бабушкина,108, помещение 15 ИНН 7536056600 тел. 40-09-75	«Многоквартирный жилой дом по ул.Кирова,41 в г.Чита (VI этап строительства»
адрес: гЧита, ул.Кирова,41а	договор аренды земельного участка № 52/21 от 19.03.2021 г.; доп.согл. 273 от 18.05.2022г.; Срок до 30.08.2027.; 
Кадастровый номер земельного участка: 75:32:020131:701, S=1729 кв.м.;	№75-32-14-2024 от 14.03.2024 г.; срок до 14.03.2026	Наш.дом.рф 17.04.2024
	4 квартал 2025 года;
	Кирпичная кладка завершена, штукатурные работы и стяжка полов завершены, ведутся работы по укладке плитки пола, шпатлевание и покраска стен, устройство кровли, монтаж лифтов, сантехнические работы, устройство остекления балконов.	Кв. 175/                            10 ДДУ/10 кв.	МЖК по ул. Подгорбунского,55, 55 а, 57,
Административное здание по ул. Анохина, 91, 
МЖК по ул. Гладкова,8,
МЖД по  ул. Шилова, 20 
I  очередь, по ул.Шилова, 19 II очередь
МЖД №№ 1, 2  в
мкр. Северный,47, ул. Шилова, 20 в г. Чите II этап строительства, МЖД по ул.Кирова, 41 в г.Чита 4 и 5 очередь; Шилова,22, Кирова,39	
			«Многоквартирный жилой дом и подземная автостоянка по ул.Кайдаловская,45 	договор аренды земельного участка № 151/22 от 21.04.2022 г.; дог. переуступки №ФРТ-06/35-23 от 7.02.2023; бессрочный; 
Кадастровый номер земельного участка: 75:32:000000:158, S=6472 кв.м.;	№ 75-RU303000-69-2008 дата выдачи 17.03.2008. Продлено до 09.12.2027	Наш.дом.рф 13.09.2024
	3 квартал 2026 года;
	
1 секция — завершены работы ниже 0,000, ведутся работы по устройству кирпичной кладки 8 этажа
2 секция — завершены работы ниже 0,000, ведутся работы по устройству кирпичной кладки 4 этажа
3 секция — ведутся работы по устройству перекрытия подвала	Кв. 348/               10 ДДУ/10 кв.		
2	ООО СЗ «Тантал Инвест»
Сальников Сергей  
Владимирович	672027,
г. Чита,
ул. Нагорная 26, офис 2,
ИНН 7536186046
тел. 44-12-15, 44-15-17	«Жилой комплекс «Звездный». Дом №3 по ул.5-я Каштакская, 15Б 3 этап строительства.	Договор купли-продажи земельного участка от 27.02.2024.                                               Кадастровый номер земельного участка: 75:32:030625:317, S=6287 кв.м.	№75-32-73-2023 от 03.11.2023 до 3.03.2025; 07.02.2025 продлено до 07.02.2026.	Наш.дом.рф
28.03.2024	4 кв. 2026	 Выполнен каркас 16 этажей в 1-ой секции и  2-ой секции. Выполняется кровля и кирпичная кладка..	222 кв.
144ДДУ/144 кв.	г. Чита, ул. Красной Звезды, 38г, г. Чита, ул. Красной Звезды, 38д 2-ой этап 1-я и 2-я очередь;.	
3	ООО СЗ «Голд
ГеоПром»  Тютюнник Максим Олегович
	672038,
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,
ГОРОД ЧИТА,
МИКРОРАЙОН КАШТАКСКИЙ,
ДОМ 1          ИНН 7536170310	Многоквартирный жилой дом ГП-1  со встроенно-пристроенными нежилы-ми помещениями и  подземным паркингом по: Забайкальский край , г.Чита, мкр.Каштакский
Адрес: г.Чита, мкр.Каштакский,1	Договор субаренды №470/24 от 11.07.2024 сроком до 18.02.2035
Кадастровый номер 75:32:030523:1013
Площадь 21 896 кв.м.	№Р057-00154-77/01304696 от 19.07.2024 до 20.07.2027	Наш.дом.рф 2.08.2024	4 квартал 2026	Выполняются работы по устройству каркаса: 1-я секция - на  10 этаже, 2-я секция – на 5 этаже, 3-я секция – на 1 этаже, 4-я секция – на 16 этаже..	508 кв и 521 н/п/                  227 ДДУ/214 кв. и  13 н/п	Многоквартирный  жилой дом №3 с подземными гаражами и стоянками в мкр. Каштакский, д.3;      Многоквартирный  жилой дом  №1 в мкр. Каштакский, д.1; Многоквартирный жилой дом №4, по адресу г.Чита,мкр.Каштакский,д.1;	
			Многоквартирный жилой дом по улице Брызгалова адрес: г.Чита, ул. Алексея Брызгалова,14	Договор купли-продажи земельного участка от 27.02.2024.                                               Кадастровый номер земельного участка: 75:32:040507:4681, S=2 852 кв.м.	№75-32-62-2024 от 26.07.2024 до 26.07.2028	Наш.дом.рф 26.08.2024	2 квартал 2026	Выполняются работы по устройству каркаса: 1-я секция - на  4 этаже, 2-я секция – на 4 этаже, 3-я секция – на 8 этаже. .Выполнена кладка стен в 1и 2 секции – 1 этаж., 3 секция – 4 этаж.
Ведутся работы по устройству вентиляции и коробов по этажам.	276 кв. и 16 н/п/                         3 ДДУ/276 кв. и  0 н/п		
4	АО СЗ «Региональное управление строительства»
Филонич Сергей Александрович	672007,г. Чита, ул. Чкалова , д. 158, ИНН 7530008329, тел. 26-52-29	Многоэтажный многоквартирный жилой дом с наземной автостоянкой открытого типа по ул.Костюшко-Григоровича, 55 в г.Чите	Земельный участок в собственности застройщика.                                               Кадастровый номер земельного участка: 75:32:030662:322, S=5 202 кв.м	№75-32-109-2024 от 25.12.2024 до 25.12.2027	Наш.дом.рф 9.01.2025	4 квартал 2027	Выполнен фундамент. Выполнено 3 этажа..	222 кв. и 69н/п/                         1ДДУ/1 кв. и  0 н/п	МЖД г. Чита,  
мкр-н Октябрьский, дома №№ 1, 4, 10, 7, 5, 9, 6,
по ул. Ингодинской, 30,
ул. Нечаева, 66,
ул. Красноармейская, 14,
ул. Красной Звезды,55, 57,
ул. Чкалова, 123,
в мкр. Северный, 71а,
в мкр. Царский, дома № 11, 12, 13,
ул. Шилова, 43,
ул. Народная, 39
ул.Алданская,11
ул.Бабушкина,4
ул.Курнатовского,70
Детский сад № 8,
Матвеева 10,                       Токмакова 43, Токмакова 49; Ивана Артеменко,7,; ул Токмакова, д. 41;, ул Токмакова, д. 47; Токмакова,39, Ивана Артеменко, 5, Токмакова,45, Ивана Артеменко, 1, ул.Ленина,150, ул. Токмакова,50 в г.Чита, ул.Кастринская,33(автопарковка), ул.Кастринская,31, ул.Токмакова,48.	
			Жилой комплекс с нежилыми помещениями по ул. Чайковского в г.Чите
Адрес: г.Чита, ул.Чайковского, 43	договор аренды земельного участка от 30 марта 2022г. № 123/22 (А).                             Срок до 26.03.2032г.	75-32-92-2023 от 27.12.2023 сроком до 27.06.2026	наш.дом.рф 6.02.2024	4 квартал 2026 года	Выполнено 9 этажей и кровля.
Установлены окна. 
Ведется внутренняя отделка и устройство внутренних сетей.	264 кв. и 94 н/п 158 ДДУ/148 кв. и 10 н/п

			Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениямипо ул. Народная, 35 в  г.Чите	договор аренды земельного участка от 31 марта 2025г. № 103/25 (г.с.).                             Срок до 30.03.2034г.
Кадастровый номер земельного участка: 75:32:000000:5014, S=7 216 кв.м	75-32-54-2025 от 15.05.2025 сроком до 15.05.2028	наш.дом.рф 22.05.2025	4 квартал 2028 года	Выполнен котлован. 
Ведется устройство фундамента.	189 кв. и 31 н/п 1 ДДУ/1 кв.  и 0 н/п

			Многоквартирный многоэтажный жилой дом по адрес: г.Чита, ул.Токмакова,35	Договор купли-продажи земельного участка от 9.02.2024 № б/н.
Кадастровый номер земельного участка:  75:32:030718:1546, S=1 729 кв.м.	75-32-53-2024 от 8.07.2024 сроком до 8.11.2025	наш.дом.рф 2.08.2024	4 квартал 2025 года	Выполнен каркас 9 этажей и кровля.
Установлены окна. 
Ведется внутренняя отделка.	44 кв. и 18 н/пом.

18 ДДУ/17 кв. и 1 н/п		
5	ООО СЗ «Атолл»
Колесник Артем Юрьевич	109029, Москва, ул. Нежигородская, д.32, стр. 15А, к. 11, офис 117-2, ИНН: 7719673738	Жилой мкр.Хороший по адресу: г.Чита, район озера Кенон, 3-я очередь строительства, 2 этап , Адрес: мкр.Хороший,17
	Договор субаренды 196/20/0 от 06.05.2022 до 24.12.2029.
Кадастровый номер 75:32:010676:53.     Площадь 14 5760 кв.м	№ 75-32-845-20224-МВР от 28.08.2024 до 29.04.2026; 	наш.дом.рф 26.08.2024	2 квартал 2026 года	Выполнены работы ниже уровня 0. 
Ведутся работы
:1-я секция – выполнено пере-крытие 3 этажа, 2-я секция - ведутся работы по армирова-нию стен 3 этажа	306 кв. и 51 н/п/    

12 ДДУ/             12 кв. и 0 н/п	ул. Магистральная, д. 110; ул. Магистральная, д. 102; ул. Магистральная, д. 106;
мкр.Хороший,10; мкр.Хороший,9; мкр.Хороший,12;
мкр.Хороший,14	
			Жилой мкр.Хороший по адресу: г.Чита,район озера Кенон, 3-я очередь строительства, 3 этап                Адрес: мкр.Хороший,16
	Договор субаренды 196/20/0 от 06.05.2022 до 24.12.2029.
Кадастровый номер 75:32:010676:53.     Площадь 14 5760 кв.м	№ 75-32-846-20224-МВР от 28.08.2024 до 29.03.2025, продлено до 29.12.2027	наш.дом.рф 26.08.2024	2 квартал 2026 года	Выполнены работы ниже уровня 0. 
Ведутся работы
:1-я секция – выполнено перекрытие 5 этажа, 2-я секция - ведутся работы по армированию стен 5 этажа 	75 кв. и 27 н/п /                                       0 ДДУ/ 0 кв. и 0 н/п		
			Жилой мкр.Хороший по адресу: г.Чита,район озера Кенон, 3-я очередь строительства, 1 этап ,  литер 1
Адрес: мкр.Хороший,15
Литер 4 (парковка)
Адрес:мкр.Хороший,17	Договор субаренды 196/20/0 от 06.05.2022 до 24.12.2029.
Кадастровый номер 75:32:010676:53     Площадь 14 576 кв.м	75-32-844-2024-МВР от 28.03.2024 до 29.04.2026	Наш.дом.рф 21.05.2024	2 квартал 2026 года	Жилой дом: в 1-ом  подъезде выполнены стены тех. этажа, во 2-ом  подъезде выполнено перекрытие 11 этажа,  в 3-ем  подъезде выполнено перекрытие 12 этажа,  в 4-ом  подъезде выполнено перекрытие 14 этажа 
Парковка: выполнены бетонные работы и устройство кровельного пирога. 	456 кв. и 75 н/п/;  
133 м/места на автостоянке/
58 ДДУ/ 58 кв. и 0 н/п		
6	ООО Специализированный застройщик «ЗАБВОр»
Тютюнник Максим Олегович	672038, г.Чита, мкр. Каштакский, д.3,кв.4   тел.  8924-819-0789
ИНН  7500016450	Многоквартирный жилой дом по ул. Токмакова 30	Договор субаренды земельного участка от   18.06.2024г. №18/06-А.. Срок до 23.01.2026 
Кадастровый номер 75:32:030721:23      Площадь 2 722 кв.м  	№75-RU303000-73-2008 от 25.03.2008 , продлен 09.09.2024 до 31.12.2024, продлено 7.11.2024 до 31.12.2025.	наш.дом.рф 28.08.2024	2 кв. 2026	Выполнен фундамент. Выпол-нено перекрытие 10-го этажа. Установлены окна 2-4 этаж.  Ведется монтаж канализации и электрики 1-3 этаж. Построен фундамент пристроенного паркинга.	 111 кв. и 5 н/п
                           54 ДДУ/ 54 кв.           и 0 н/пом.	нет	
7	
ООО СЗ «СК Энергожилстрой»
Лопатин Виктор Алексеевич	672000,
Забайкальский край,
Г.О. ГОРОД ЧИТА,
Г ЧИТА,
УЛ БАЛЯБИНА,
Д. 13,
ИНН 7536076903
	«Многоэтажный жилой комплекс в границах ул. Генерала Белика, ул.1-й Новопроточной, ул.Февральская в г. Чите», адрес: г. Чита, ул. Генерала Белика,3	В собственности земельный участок  75:32:030660:76.                                        Собственность №75:32:030660:76-75/071/2020-16 зарегистрирована 28.05.2020 	№75-31-28-2024 от 26.04.2024 до 26.04.2027	наш.дом.рф 3.05.2024	3 кв. 2026г.	Выполнен каркас 1-16-го этажа и устройство фасадов 1-10 этажа.	170 кв. и 63 н/п/ и 55 м/мест/
102 ДДУ/89 кв. и 13 н/п	Жилой комплекс квартальной застройки в границах улиц Александро-Заводская,3-я Забайкальская и Кабанская 2-очередь строительства-дои №2; ул.Проезжая,7,  ул.Проезжая,5.
	
8	ООО СЗ «Трансстройдевелопмент Развитие» Куницкий
Евгений
Александрович	672014, г.Чита, ул.Олимпийская,,27Б,стр.3
ИНН  7500016731 	«Многоквартирный жилой квартал» зем.участок №75:32:080347:648» 1 этап, 1-я очередь»
Адрес:г.Забайкальск,                        ул.Южная	Договор субаренды земельного участка, выдан 28.02.2024. Срок до 07.07.2028.
Кадастровый номер 75:06:080347:648
Площадь 24 277 кв.м	№92-RU92508101-11-2024 от 27.06.2024 до 27.06.2026	наш дом рф 20.08.2024	1 кв. 2026	Выполнены работы по устрой-ству фундаментов. Выполнен 1 этаж и подвал.	124 кв.

1 ДДУ/ 124 кв.	нет	
			Многоквартирный жилой квартал» зем.участок №75:32:080347:648» 1 этап, 1-я очередь»
Адрес:г.Забайкальск,                        ул.Южная	Договор субаренды земельного участка, выдан 28.02.2024. Срок до 07.07.2028.
Кадастровый номер 75:06:080347:648
Площадь 24 277 кв.м	№92-RU92508101-11-2024 от 27.06.2024 до 27.06.2026	наш дом рф 20.08.2024	1 кв. 2026	Выполнены работы по устройству фундаментов. Выполнены работы ниже 0-уровня. 	124 кв.

21 ДДУ/ 84 кв.		
9	ООО СЗ «Трансстройдевелопмент» Куницкий
Евгений
Александрович	690062, г.Владивосток, ул.Днепровская, 107, офис 4 инн 2543166718	Жилой микрорайон по адресу: Забайкальский край, г.Чита, мкр.№7, земельный участок 75:32:040511:48, 2 этап, 1 очередь строительства
Адрес: г.Чита, пр-кт. Маршала Жукова,9	Договор субаренды №б/н от 18.07.2022 сроком до 24.02.2030.
Кадастровый номер 75:32:040511:48
Площадь 250 053 кв.м	75-32-70-2023 от 19.10.2023 г до 19.12.2025	наш дом рф 14.11.2023	3 кв. 2025	Строительство завершено. Назначена итоговая проверка законченного строительством объекта в июле 2025 года	293 кв. и 127 н/п
3 ДДУ/ 293кв.	Маршала Жукова,8	
			«Жилой микрорайон по адресу: Забайкальский край, г.Чита, мкр. №7, земельный участок №75:32:040511:5730, 2 этап, 2 очередь строительства»,
Аадрес: г.Чите, проспект Маршала Жукова,6	Доп. соглашение к договор субаренды №б/н от 21.03.2025 сроком до 24.02.2030.
Кадастровый номер  75:32:040511:5730
Площадь 20 269 кв.м	75-32-46-2025 от 16.04.2025 г до 16.06.2027	наш дом рф 7.05.2025	2 кв. 2027	Ведутся работы по устройству котлована.	304 кв. и 34 н/п
1 ДДУ/ 1 кв. и 0 н/п		
			Жилой микрорайон по адресу: Забайкальский край, г.Чита, мкр.№7, земельный участок 75:32:040511:48, 1 этап, 2 очередь строительства
Адрес: г.Чита, пр-кт. Маршала Жукова,7	Договор субаренды №б/н от 18.07.2022 сроком до 24.02.2030.
Кадастровый номер 75:32:040511:48
Площадь 250 053 кв.м	75-32-68-2024 от 08.08..2024 г до 08.10.2026	наш дом рф 31.10.2024	4 кв. 2026	Выполнены работы ниже         0-уровня. Выполнены работы по устройству цоколя с утеплением. Выполнено 5 этажей.	293 кв. и 108 н/п
99 ДДУ/ 99 кв. и 5н/п		
10	ООО СЗ Мир Инвест» Дудкина Елена Анатольевна	672020, г.Чита, ул. Промышленная, влд.7, пом.192
ИНН  75361814185	«Многоквартирный жилой дом по адресу: г.Чита, ул.Бабушкина 42б», расположенный по адресу: г.Чита, ул.Проезжая,1а	Договор субаренды земельного участка 57 от 9.04.2024 сроком до 30.07.2027.
Кадастровый номер  75:32:030758:678
Площадь 3 089  кв.м	75-32-29-2024 от 26.04.2024 до 25.08.2025	наш.дом.рф 16.05.2024	1 кв. 2026	Выполнен фундамент, каркас и кладка 1-16 этаж. Установлены окна  1-5 этаж. Выполнены: электропроводка 1-9 этаж, вентиляция 1-6 этаж, штукатурка 1-8 этаж	222 кв. и 64 н/п

137 ДДУ/ 111 кв. и 26 н/п	нет	
			«Многоквартирный жилой дом с переменной этажностью по ул. Бабушкина», расположенный по адресу: г.Чита, ул.Проезжая,3	Договор субаренды земельного участка 57 от 9.04.2024 сроком до 30.07.2027.
Кадастровый номер  75:32:030758:664
Площадь 3 801  кв.м	75-32-93-2024 от 22.10.2024 до 22.02.2026	наш.дом.рф 01.11.2024	1 кв. 2027	Выполняются работы ниже 0-уровня. Закончена кирпичная кладка техподполья и установлены колонны 1 этажа.	202 кв. и 123 н/п

51 ДДУ/ 34 кв. и  17 н/п		
11	ООО СЗ «СК Энергожилстрой-МКР»
Асламова Валерия Станиславовна	672015, г.Чита, Агинский тракт, влад.28, стр.15
ИНН 7536188981	«Многоквартирный жилой дом (№6 по ППТ), расположенный по адресу :г. Чита, мкр. Романовский»
Адрес: мкр.Романовский, 32	договор субаренды 284/23 от 5.04.2023 сроком до 1.12.2041.
кадастровый номер земельного участка: 75:32:010223:947, S=7 739 кв.м.	Р057-00154-77/01369285 от 30.08..2024 г. сроком до 31.07.2025, продлен до 31.12.2026.	наш дом рф 04.12.2024	4 кв. 2026	Ведется организация строительной площадки.	192кв.
0 ДДУ/0 кв.	г. Чита, мкр.Романовский,30 корпус 1 и корпус 2;. мкр.Романовский, 29,
мкр.Романовский, 28	
			«Многоквартирный жилой дом (№9 по ППТ), расположенный по адресу :г. Чита, мкр. Романовский»
Адрес: мкр.Романовский, 31	Договор субаренды земельного участка 204/24 от 10.04.2024 сроком до 01.12.2041.
кадастровый номер земельного участка:  75:32:010223:950, S=5 799 кв.м.	75-32-859-2024-МВР от 21.05.2024 г. сроком до 6.04.2025, продлено до 6.12.2025	наш дом рф 30.05.2024	4 кв. 2025	Выполнен фундамент и кладка 1-9-го этажа. Установлены окна, облицован фасад. 
Ведутся внутренние работы.	106 кв./              71 ДДУ/71 кв.		
12	ООО «СЗ «Победа»
Тютюнник Максим Олегович	672007, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД ЧИТА, Г ЧИТА, УЛ БАЛЯБИНА, Д. 75, СТР. 8	Многоквартирные многоэтажный жилой дом по ул.Кочеткова,76	В собственности земельный участок  75:32:030701:69.                                       Договор купли-продажи земельного участка от 7.02.2024.	№92-RU92303000-176-2020 от 25.11.2020 до 25.01.2025; продлено 20.12.2024 до 30.09.26	наш дом рф 15.03.2024	3 кв. 2026	Выполнен фундамент. Выполнено перекрытие 11-го этажа. Установлены окна 1-8 этаж. Оштукатурены лестничные марши 1-7 этаж.	192 кв.
149 ДДУ/149 кв.	нет	
13	ООО СЗ «СК ЭЖС-Чита»
Лопатин Виктор Алексеевич	672000, г.Чита,, ул.Балябина,  13, пом.502	Многоквартирный  жилой дом с подземной автостоянкой по ул.Проезжая в г.Чита
Адрес: ул.Проезжая,4	Договор купли-продажи земельного участка
Кадастровый номер  75:32:030759:1122
Площадь 5993 кв.м	№75-32-80-2024 от 16.09.2024 до 16.01.2026	наш дом рф 24.09.2024	3 кв. 2026	Выполнено в 1 и 2  корпусе - тех. подполье и каркас 1-8 этаж.	126 кв. и 103 н/п
60 ДДУ/47 кв. и 13 н/п	Ул.Бабушкина 10, секция 1 и 2; ул. Виля Липатова,13	
14	ООО СЗ «Тантал» 
Сальников Сергей  
Владимирович	672027,
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,
г. ЧИТА,
ул. Нагорная,
д. 26        ИНН 7536004747	«Многоквартирный  жилой дом с подземной автостоянкой по ул.Кочетккова,56»	Договоры купли-продажи земельных участков.
Кадастровый номер  75:32:030705:823
Площадь 2100 кв.м	№75-32-67-2024 от 07.08.2024 до 07.07..2025, продлено до 07.07.2026	наш дом рф 09.01.2025	3 кв. 2027	Выполнен фундамент. Выполнен каркас 3-го этажа.	142 кв. и 27 м/м/
 57 ДДУ/51 кв. и 6 м/м	МЖД по ул. Нагорная 26, 
ул. Кочеткова 53,
ул. Богомягкова, 55,  
Богомягкова, 107,
ул. Анохина, 93, 
Бутина, 78, 
ул. Новобульварная, 38,
ул.Кастринская,9
Жилая застройка 
в районе 
ул. Усуглинская, 2.
Группа жилых домов по ул. Богомягкова-Кочеткова 
Группа жилых домов по проспекту Жукова 
в г. Чите, Тимирязева 23 1 и 2 этап, Новобульварная 40, дом  по ул.Усуглинская,2 дом №4., Кр.Коммунаров,1	
15	ООО СЗ «Ракета»
 Плаксин Владимир Александрович	672042,
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,
г. ЧИТА,
ПРОЕЗД ИВАНОВСКИЙ,
д. 10,
пом 15 
ИНН 7536137994	Группа жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 75:32:020141:5 (Дом №9)
адрес: г. Чита, Ангарская,4	Договор аренды земельных участков. 
Срок до 14.11.2030г.
Кадастровый номер  75:32:020141:265
Площадь 2322 кв.м	№75-32-10-2025 от 23.01.2025 до 23.10.2025	наш дом рф 10.02.2025	4 кв. 2026	Выполнен фундамент. Выполнен каркас и кладка 1-9  этажа, штукатурка и электромонтажные работы  на 1 этаже.	108 кв./ 7ДДУ/7кв.	нет	
			Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Забайкальский край, г.Чита, ул. Нерчинско-Заводская, участок с кадастровым номером 75:32:020141:240,
Адрес: г. Чита, мкр. Квартал Мира,5	Договор аренды земельных участков. 
Срок до 14.11.2030г.
Кадастровый номер  75:32:020141:240
Площадь 2032 кв.м	№75-32-23-2025 от 14.02.2025 до 14.08.2028	наш дом рф 28.05.2025	4 кв. 2026	Выполнены фундамент и работы ниже 0- уровня.	90 кв. и 53 н/п/ 1ДДУ/1кв. и 0 н/п		
			Группа жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 75:32:020141:5 (Дом №8)
адрес: г. Чита, Нерчинско-Заводская,3	Договор аренды земельных участков. 
Срок до 14.11.2030г.
Кадастровый номер  75:32:020141:264
Площадь 4616 кв.м	№75-32-11-2025 от 23.01.2025 до 23.10.2025	наш дом рф 21.02.2025	1 кв. 2027	Выполнен фундамент и тех. этаж..Выполнена кладка 3 этажа.	195 кв. и 111 н/п
/ 16 ДДУ/14кв. и 2 н/п		
16	ООО СЗ «Домостроительный комбинат» Бирюков Александр Борисович	672015,
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,
Г ЧИТА,
ТРАКТ АГИНСКИЙ,
ВЛД. 25, СТР. 3	«Жилой комплекс «Серебрянный бор» г.Чита: 1 этап строительства,: жилой дом №2 по ГП»
Адрес:ул.Богдана Хмельницкого,16	Договор купли-продажи земельного участ-ка от 18.06.2024.
Кадастровый номер  75:32:020105:762
Площадь 2151 кв.м	№75-32-113-2024 от 28.12.2024 до 28.12.2026	наш дом рф 20.01.2025	4 кв. 2025	Выполнен фундамент. Выполнен монтаж ЖБ конструкций до 9 этажа. Выполнен монтаж оконных блоков до 9 этажа. Выполнены электромонтажные работы до 8  этажа. Выполнен монтаж 50% радиаторов отопления. Выполнена 50% внутр. отделки.  	70 кв.
8 ДДУ/ 8 кв.	нет	
			«Жилой комплекс «Серебрянный бор» г.Чита: 1 этап строительства,: жилой дом №3 по ГП»
Адрес:ул.Богдана Хмельницкого,14	Договор купли-продажи земельного участ-ка от 18.06.2024.
Кадастровый номер  75:32:020105:763
Площадь 4819 кв.м	№75-32-114-2024 от 28.12.2024 до 28.12.2026	наш дом рф 20.01.2025	4 кв. 2025	Выполнен фундамент. Выполнен монтаж ЖБ конструкций до 6 этажа. Выполнен монтаж окон до 4 этажа. Выполняется работы по устройству внутр. сетей и отделке	171 кв. и 1 н/п
9 ДДУ/9 кв.		
17	ООО СЗ «Стройсфера» Будаева Юлия Алексеевна	672039,
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,
г. ЧИТА,
ул. ГАГАРИНА,
д. 10А,
офис 1	«Многоквартирный  жи-лой дом по адресу: г. Чита, пер. Парковый, дом 15»	Договор купли-продажи земельного участ-ка от 02.03.2023.
Кадастровый номер  75:32:020124:167
Площадь 2652 кв.м	№75-32-112-2024 от 28.12.2024 до 28.10.2025	наш дом рф 28.03.2025	3 кв. 2026	Выполнена кладка 3 этажа. Ведется устройство перегородок и внутренних сетей.	90 кв. и 17 н/п
0ДДУ/ 0 кв. 0. н/п	г.Шилка, ул.Балябина,129,г.Чита, пер.Парковый 14	
18	ООО СЗ «Проект-С-47» Боган  Константин Михайлович	672038,
г. ЧИТА,
МКР КАШТАКСКИЙ,
Д. 1,
ПОМЕЩ. 3	Комплексная застройка мкр. Дальневосточный квартал в границах ул.Ковыльная-Железобетонная на территрории гюЧита, 1 очередь строительства
Корпус 1.1
Адрес: г.Чита, ул.Железобетонная-пер. Зоотехнический	Договор субаренды земельного участка 45/24 от 01.02.2024. Срок до 18.01.2034
 Кадастровый номер  75:32:000000:4205
Площадь 42 135 кв.м 
Кадастровый номер  75:32:000000:4233
Площадь 49 580 кв.м	№75-32-877-2024-МБР от 5.08.2024 до 6.08.2027	наш дом рф 12.08.2024	3 кв. 2026	Выполнен котлован. Свайное поле завершено. Выполнен фундамент и  бетонирование плиты перекрытия 7 этажа.	144 кв./
61 ДДУ/61 кв.	нет	
			Комплексная застройка мкр. Дальневосточный квартал в границах ул.Ковыльная-Железобетонная на территрории гюЧита, 1 очередь строительства
Корпус 1.2
Адрес: г.Чита, ул.Железобетонная-пер. Зоотехнический	Договор субаренды земельного участка 45/24 от 01.02.2024. Срок до 18.01.2034
Кадастровый номер  75:32:000000:4205
Площадь 42 135 кв.м 
Кадастровый номер  75:32:000000:4233
Площадь 49 580 кв.м	№75-32-877-2024-МБР от 5.08.2024 до 6.08.2027	наш дом рф 12.08.2024	3 кв. 2026	Выполнен котлован. Свайное поле завершено. Выполнен фундамент и армирование  вертикальных конструкций 7 этажа..	144 кв./
49 ДДУ/49 кв.		
			Комплексная застройка мкр. Дальневосточный квартал в границах ул.Ковыльная-Железобетонная на территрории гюЧита, 1 очередь строительства
Корпус 1.3
Адрес: г.Чита, ул.Железобетонная-пер. Зоотехнический	Договор субаренды земельного участка 45/24 от 01.02.2024. Срок до 18.01.2034
Кадастровый номер  75:32:000000:4205
Площадь 42 135 кв.м 
Кадастровый номер  75:32:000000:4233
Площадь 49 580 кв.м	№75-32-877-2024-МБР от 5.08.2024 до 6.08.2027	наш дом рф 12.08.2024	3 кв. 2026	Выполнен котлован. Свайное поле завершено. Выполнен фундамент и бетонирование  вертикальных конструкций 8 этажа. Выполнен монтаж кладки 5 этажа.	144 кв./
2 ДДУ/144 кв..		
			Комплексная застройка мкр. Дальневосточный квартал в границах ул.Ковыльная-Железобетонная на территрории гюЧита, 1 очередь строительства
Корпус 1.4
Адрес: г.Чита, ул.Железобетонная-пер. Зоотехнический	Договор субаренды земельного участка 45/24 от 01.02.2024. Срок до 18.01.2034
Кадастровый номер  75:32:000000:4205
Площадь 42 135 кв.м 
Кадастровый номер  75:32:000000:4233
Площадь 49 580 кв.м	№75-32-877-2024-МБР от 5.08.2024 до 6.08.2027	наш дом рф 12.08.2024	3 кв. 2026	Выполнен котлован. Свайное поле завершено. Выполнен фундамент и бетонирование  вертикальных конструкций 9 этажа. Выполнен монтаж кладки 5 этажа.	144 кв./
2 ДДУ/75 кв.		
ИТОГО	18 застройщиков – 38 объектов капитального строительства 	1603 ДДУ / 2466 кв. и 106 н/п