Сведения
о застройщиках и объектах капитального строительства, строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства
по состоянию на 30 марта 2026 года (по сведениям, размещаемым застройщиками в ЕИСЖС).
	
№ п/п	Наименование застройщика Ф.И.О. руководителя	Реквизиты застройщика 	Наименование объекта стр-ва, адрес	Правоустанавливающие документы на земельный участок (наименование документа, дата, №, дата гос.регистрации срок действия)	Разрешение на строительство (дата, №, срок действия)	Проектная декларация, место, дата 
размещения	Срок ввода объекта	Состояние объекта	Кол-во сам-ных частей (по проекту)
/
 кол-во ДДУ	Объекты, строительство которых ранее осуществлял застройщик	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ООО Специализированный застройщик «Радченко»
Прищепова Наталья 
Михайловна	г. Чита, 
ул. Бабушкина,108, 
помещение 15 ИНН 7536056600 тел. 40-09-75	«Многоквартирный жилой дом и подземная автостоянка по ул.Кайдаловская,45» 	договор аренды земельного участка 
№ 151/22 от 21.04.2022 г.; 
дог. переуступки 
№ФРТ-06/35-23 от 7.02.2023; 
бессрочный; 
Кадастровый номер 
земельного участка: 
75:32:000000:158, S=6472 кв.м.	№ 75-RU303000-69-2008 
дата выдачи 17.03.2008. 
Продлено до 09.12.2027	Наш.дом.рф 13.09.2024	3 квартал 
2026 года	1 секция:
завершены работы ниже 0,000, завершена кирпичная кладка и установка окон 1-15 этаж, оштукатуривание стен 2-10 этаж, стяжка пола 2-9 этаж, остекление лоджий — со 2 по 11 этаж,
кровля — пароизоляция.
2 секция:
завершены работы ниже 0,000, завершена кирпичная кладки 1-15 этаж, оштукатуривание стен 2-11 этаж и установка окон 2-13 этаж, стяжка пола 2-8 этаж, 
установка сантехники 2-10 этаж, 
электрика 1-13 этаж, остекление лоджий — со 2 по 3 этаж,
3 секция:
завершены работы ниже 0,000, выполнены работы по устройству кирпичной кладки 1-8 этажей и установка окон 2-7 этаж, электрика 1-7 этаж.
Работы ведутся.	Кв. 348 
20 н/п

80 ДДУ/80 кв.	Многоквартирные жилые дома по улицам:
Подгорбунского,55, 55 а, 57,
Гладкова,8,
Шилова, 19, 20, 22 
в мкр. Северный,47, ул. Кирова, 39, 41, 41а
Административное здание по ул. Анохина, 91	
2	ООО СЗ 
«Голд
ГеоПром»  Тютюнник Максим 
Олегович	672038,
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,
ГОРОД ЧИТА,
МИКРОРАЙОН КАШТАКСКИЙ, ДОМ 1
ИНН 7536170310	Многоквартирный жилой дом ГП-1 
со встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями и  подземным паркингом по: Забайкальский край , г.Чита, мкр.Каштакский
Адрес: г.Чита, мкр.Каштакский,10, 
1 и 2 этап	Договор субаренды №470/24 от 11.07.2024 сроком до 18.02.2035
Кадастровый номер 75:32:030523:1013
Площадь 21 896 кв.м.	№Р057-00154-77/01304696 от 19.07.2024 до 20.07.2027	Наш.дом.рф 2.08.2024	4 квартал 2026	1.1 секция –– каркас 100%, фасад — 90%, окна — 98%, кладка -100%, перегородки -95%, черновые полы — 90%, отделка 65%, электромонтажные работы — 90%, отопление - 90%, водоснабжение – 90%, канализация – 100%, вентиляция — 85 %, кровля- 95%.;
1.2 секция – каркас 85%, перегородки – 5%, отопление - 5%, водоснабжение – 5%, канализация – 5%.
1.3 секция – каркас 85%. 
1.4 секция - каркас 100%, фасад — 90%, окна — 98%, кладка -100%, перегородки -95%, черновые полы — 90%, отделка 65%, электромонтажные работы — 90%, отопление - 90%, водоснабжение – 90%, канализация – 100%, вентиляция — 85 %, кровля- 95%.;
1.5 секция – каркас 100%;
1.6 секция – каркас 100%;
1.7 секция – каркас 90%.
Ведутся работы по устройству наружных сетей: теплоснабжения – 75%, канализации — 65%, 
водоснабжение-85% 	528 кв и 380 н/п/
                      493 ДДУ/436 кв. и  57 н/п	МКД №1, 3, 4 
в мкр. Каштакский	
			Многоквартирный жилой дом по улице Брызгалова адрес: г.Чита, ул. Алексея Брызгалова,14	Договор купли-продажи земельного участка от 27.02.2024.                                               Кадастровый номер земельного участка: 75:32:040507:4681, S=2 852 кв.м.	№75-32-62-2024 от 26.07.2024 до 26.07.2028	Наш.дом.рф 26.08.2024	2 квартал 2026	Выполнены работы по устройству каркаса 100%, кладка наружных стен -100%, фасад — 70% , перегородки -96%, черновые полы — 5%, отделка - 5%, электромонтажные работы — 80%, сантехнические работы — 80%, вентиляция — 80 %, кровля -33%
Ведутся работы по устройству наружных сетей: теплоснабжения – 100%, водоснабжение и канализации — 35%	276 кв. и 16 н/п/ 
                         3 ДДУ/276 кв. и  0 н/п		
3	АО СЗ «Региональное управление строительства»
Филонич Сергей Александрович	672007,г. Чита, ул. Чкалова , д. 158, ИНН 7530008329, тел. 26-52-29	Многоэтажный многоквартирный жилой дом с наземной автостоянкой открытого типа по ул.Костюшко-Григоровича, 55 в г.Чите	Земельный участок в собственности застройщика.
Кадастровый номер земельного участка: 75:32:030662:322, S=5 202 кв.м	№75-32-109-2024 от 25.12.2024 до 25.12.2027	Наш.дом.рф 9.01.2025	4 квартал 2027	Выполнены СМР 1-16-ый этаж
Ведутся работы по отделке квартир, мест общего пользования, по монтажу оконных и балконных блоков, остеклений лоджий, сантехнические и электромонтажные работы.	222 кв. 
69н/п
/

165ДДУ/
118 кв. 
47 н/п	МЖД №№ 1, 4, 10, 7, 5, 9, 6 
в мкр-н Октябрьский, 
МКД
по ул. Ингодинской, 30,
ул. Нечаева, 66,
ул. Красноармейская, 14,
ул. Красной Звезды,55, 57,
ул. Чкалова, 123,
в мкр. Северный, 71а,
МКД № 11, 12, 13,
в мкр. Царский, 
МКД по 
ул. Шилова, 43,
ул. Народная, 39
ул.Алданская,11
ул.Бабушкина,4
ул.Курнатовского,70
Детский сад № 8,
Матвеева 10,
Токмакова 35,39,41,43,45, 47,48,49,50; 
Ивана Артеменко,1, 5, 7, ул.Ленина,150, 
ул.Кастринская,31
Парковка по ул.Кастринская,33,
Ул.Чайковского,43.	
			Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениямипо ул. Народная, 35 в  г.Чите	договор аренды земельного участка от 31 марта 2025г. № 103/25 (г.с.).                             Срок до 30.03.2034г.
Кадастровый номер земельного участка: 75:32:000000:5014, S=7 216 кв.м	75-32-54-2025 от 15.05.2025 сроком до 15.05.2028	наш.дом.рф 22.05.2025	4 квартал 2028 года	Выполнен фундамент.
Выполнено 11 этажей.
Ведутся работы по устройству кирпичной кладки на уровне 12 этажа, изготавливаются и комплектуются оконные конструкции	189 кв.
31 н/п 

52 ДДУ
/45 кв.
7 н/п		
			Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г.Чита, ул. Петровско-Заводская,30	Земельный участок в собственности.
Решение о перераспределении земельных участков от 17.07.2025
Кадастровый номер земельного участка:  75:32:020119:796, S=4 767 кв.м.	75-32-69-2025 от 178.07.2024 сроком до 17.07.2028	наш.дом.рф 24.07.2024	3 квартал 2028 года	Выполнены работы по устройству фундамента.
1 секция – ведутся работы по устройству фундаментных стен.
2 секция - завершена работа по устройству кирпичной кладки на уровне первого этажа с перекрытием.
Возобновлены работы по строительству фундаментных стен первой секции, во втором подъезде начата кирпичная кладка на уровне второго этажа.	238 кв., 
91 н/пом. 
 94 м/м

34 ДДУ/
26 кв. и 8 н/п		
4	ООО СЗ «Атолл»
Колесник Артем Юрьевич	109029, Москва, ул. Нежигородская, д.32, стр. 15А, к. 11, офис 117-2, ИНН: 7719673738	Жилой мкр.Хороший по адресу: г.Чита, район озера Кенон, 3-я очередь строительства, 2 этап , Адрес: мкр.Хороший,17	Договор субаренды 196/20/0 от 06.05.2022 до 24.12.2029.
Кадастровый номер 75:32:010676:53.     Площадь 14 5760 кв.м	№ 75-32-845-20224-МВР от 28.08.2024 до 29.04.2026; 	наш.дом.рф 26.08.2024	4 квартал 2026 года	Выполнены работы ниже уровня 0. 
Выполнен каркас 1-6 этажа.
Работы ведутся.	306 кв. 
51 н/п/    

137 ДДУ/             137 кв. и 0 н/п	МКД
ул. Магистральная, д. 102, 106, 110;

мкр.Хороший,9, 10, 12, 14	
			Жилой мкр.Хороший по адресу: г.Чита,район озера Кенон, 3-я очередь строительства, 3 этап                Адрес: мкр.Хороший,16	Договор субаренды 196/20/0 от 06.05.2022 до 24.12.2029.
Кадастровый номер 75:32:010676:53.     Площадь 14 5760 кв.м	№ 75-32-846-20224-МВР от 28.08.2024 до 29.03.2025, продлено до 29.12.2027	наш.дом.рф 26.08.2024	4 квартал 2026 года	Выполнены работы ниже уровня 0.
Полностью выполнен каркас здания. Выполнена кладка газоблоков 2-7 этажа. Выполнена штукатурка до 4 этажа.
Работы ведутся.	75 кв. 
27 н/п
 /                                       21 ДДУ/ 
21 кв. и 0 н/п		
			Жилой мкр.Хороший по адресу: г.Чита,район озера Кенон, 3-я очередь строительства, 1 этап ,  литер 1
Адрес: мкр.Хороший,15
Литер 4 (парковка)
Адрес:мкр.Хороший,17	Договор субаренды 196/20/0 от 06.05.2022 до 24.12.2029.
Кадастровый номер 75:32:010676:53     Площадь 14 576 кв.м	75-32-844-2024-МВР от 28.03.2024 до 29.04.2026	Наш.дом.рф 21.05.2024	2 квартал 2026 года	Жилой дом:
1-ый  подъезд: выполнен полностью каркас, кладка стен, перегородок, штукатурка квартир, стяжка.
Выполняется установка окон 2-10 этаж;
2-ой  подъезд: выполнен полностью каркас, выполняется кладка 16 этажа, стяжка пола 10 этажа и кровли, работы по установке окон 18 этажа;
 3-ий  подъезд: выполнен полностью каркас, кладка 2-18 этаж,  
окна 1-18 этаж;
Выполнена стяжка пола по 10 этаж и кровли. Закончена шпаклевка и монтаж потолков 2-18 этаж.
  4-ый  подъезд: выполнен полностью каркас, кладка 2-18 этаж,  установка окон 1-18 этаж. 
Выполнена стяжка пола до 11 этажа и кровли. 
Парковка: выполнены бетонные работы и устройство кровельного пирога. 	456 кв. и 75 н/п/;  
133 м/места на автостоянке/

231 ДДУ/ 230 кв. и 2 н/п		
5	ООО Специализированный застройщик «ЗАБВО»
Тютюнник Максим Олегович	672038, г.Чита, мкр. Каштакский, д.3,кв.4   тел.  8924-819-0789
ИНН  7500016450	Многоквартирный жилой дом по ул. Токмакова 30 (с автостоянкой)	Договор аренды земельного участка от   27.10.2025г. №336/25(онс). Срок до 26.10.2028 
Кадастровый номер 75:32:030721:675      Площадь 5 813 кв.м  	№75-RU303000-73-2008 от 25.03.2008 ,  продлено 10.02.2026 до 26.10.2026.	наш.дом.рф 28.08.2024	2 кв. 2026 - дом; 
1 кв. 2028 - автостоянка	Выполнен: каркас 100%, перегородки 100%, штукатурка 85%, электромонтажные работы 80%, остекление 90%, сантехнические работы 45%, утепление фасадов 40%.
Построен фундамент пристроенного паркинга, полы, стены и перекрытия выполнены на 100%.
Наружные сети вода-30%, канализация -80%, тепло-10%.
Работы ведутся.	 101 кв.
86 н/п
                           92 ДДУ/ 
86 кв.,
6 н/пом.	нет	
6	ООО СЗ «СК Энергожилстрой»
Лопатин Виктор Алексеевич	672000,
Забайкальский край,
Г.О. ГОРОД ЧИТА,
Г ЧИТА,
УЛ БАЛЯБИНА,
Д. 13,
ИНН 7536076903	«Многоэтажный жилой комплекс в границах ул. Генерала Белика, ул.1-й Новопроточной, ул.Февральская в г. Чите», адрес: г. Чита, ул. Генерала Белика,3	В собственности земельный участок  75:32:030660:76.                                        Собственность №75:32:030660:76-75/071/2020-16 зарегистрирована 28.05.2020 	№75-31-28-2024 от 26.04.2024 до 26.04.2027	наш.дом.рф 3.05.2024	3 кв. 2026г.	Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме.
Выполняется благоустройство.	170 кв. и  8 н/п/ и 47 м/мест

203 ДДУ/160 кв. и 43 н/п и м/м	ЖК в границах улиц 
Александро-Заводская,
3-я Забайкальская
 Кабанская 
2-очередь строительства
дом №2; 
ул.Проезжая,5, 7	
7	ООО СЗ «Трансстройдевелопмент Развитие» Куницкий
Евгений
Александрович	672014, г.Чита, ул.Олимпийская,,27Б,стр.3
ИНН  7500016731 	«Многоквартирный жилой квартал» зем.участок №75:32:080347:648» 1 этап, 1-я очередь»
Адрес:г.Забайкальск,                        ул.Южная,д.1	Договор субаренды земельного участка, выдан 28.02.2024. Срок до 07.07.2028.
Кадастровый номер 75:06:080347:648
Площадь 24 277 кв.м	№92-RU92508101-11-2024 от 27.06.2024 до 27.06.2026	наш дом рф 20.08.2024	1 кв. 2026	Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме.
Выполняется благоустройство.	124 кв.

1 ДДУ/ 124 кв.	нет	
			Многоквартирный жилой квартал» зем.участок №75:32:080347:648» 1 этап, 1-я очередь»
Адрес:г.Забайкальск,                        ул.Южная,д2	Договор субаренды земельного участка, выдан 28.02.2024. Срок до 07.07.2028.
Кадастровый номер 75:06:080347:648
Площадь 24 277 кв.м	№92-RU92508101-11-2024 от 27.06.2024 до 27.06.2026	наш дом рф 20.08.2024	1 кв. 2026	Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме.
Выполняется благоустройство.	124 кв.

29 ДДУ/ 92 кв.		
8	ООО СЗ «Трансстройдевелопмент» Куницкий
Евгений
Александрович	690062, г.Владивосток, ул.Днепровская, 107, офис 4 инн 2543166718	«Жилой микрорайон по адресу: Забайкальский край, г.Чита, мкр. №7, земельный участок №75:32:040511:5730, 2 этап, 2 очередь строительства»,
Аадрес: г.Чите, проспект Маршала Жукова,6	Доп. соглашение к договор субаренды №б/н от 21.03.2025 сроком до 24.02.2030.
Кадастровый номер  75:32:040511:5730
Площадь 20 269 кв.м	75-32-46-2025 от 16.04.2025 г до 16.06.2027	наш дом рф 7.05.2025	2 кв. 2027	Выполнены работы по устройству котлована, фундамента. 
Выполняются СМР:
Выполнены фундаменты. Ведутся монолитные работы:
1 секции - 2 этаж, во 2 секции - 3 этаж. в 3 секции — 1 этаж в 4 секции — 1 этаж	304 кв. и 34 н/п

168 ДДУ/ 168 кв. и 0 н/п	Маршала Жукова,8, 9	
			Жилой микрорайон по адресу: Забайкальский край, г.Чита, мкр.№7, земельный участок 75:32:040511:48, 1 этап, 2 очередь строительства
Адрес: г.Чита, пр-кт. Маршала Жукова,7	Договор субаренды №б/н от 18.07.2022 сроком до 24.02.2030.
Кадастровый номер 75:32:040511:48
Площадь 250 053 кв.м	75-32-68-2024 от 08.08..2024 г до 08.10.2026	наш дом рф 31.10.2024	4 кв. 2026	Выполнены работы ниже 0-уровня. Выполнены работы по устройству цоколя с утеплением. 
Выполнены монолитные работы, кладка стен, установка оконных и балконных блоков на 50%
На данный момент выполняются работы по:
1.    Выполнение работ по обустройству кровли: утепление, гидроизоляция – 50%
2.    Обустройство инженерных сетей – 55%
3.    Устройство фасада: облицовка керамогранитом – 40%
4.    Монтаж перилл лестничных маршей – 65%,
5.    Установка лифтового оборудования – 30%	291 кв. и 141 н/п

304 ДДУ/ 284 кв. и 20 н/п		
9	ООО СЗ 
Мир Инвест» Дудкина Елена Анатольевна	672020, г.Чита, ул. Промышленная, влд.7, пом.192
ИНН  75361814185	«Многоквартирный жилой дом по адресу: г.Чита, ул.Бабушкина 42б», расположенный по адресу: г.Чита, ул.Проезжая,1а	Договор субаренды земельного участка 57 от 9.04.2024 сроком до 30.07.2027.
Кадастровый номер  75:32:030758:678
Площадь 3 089  кв.м	75-32-29-2024 от 26.04.2024 до 25.08.2025,
 продлен до 25.08.2026	наш.дом.рф 16.05.2024	1 кв. 2026	Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме.
Выполняется благоустройство.	222 кв. и 64 н/п

240 ДДУ/ 194 кв. и 46 н/п	нет	
			«Многоквартирный жилой дом с переменной этажностью по ул. Бабушкина», расположенный по адресу: г.Чита, ул.Проезжая,3	Договор субаренды земельного участка 57 от 9.04.2024 сроком до 30.07.2027.
Кадастровый номер  75:32:030758:664
Площадь 3 801  кв.м	75-32-93-2024 от 22.10.2024 до 13.10.2026	наш.дом.рф 01.11.2024	1 кв. 2027	Выполнены работы ниже 0-уровня.
Выполнены: 
 Секция 1 - каркас здания на уровне 9 этажей, кирпичная кладка - 3 этажа. 
Секция 2 - каркас здания на уровне 9 этажей, кирпичная кладка - 3 этажа, перекрыт тех этаж. 	202 кв. и 123 н/п

183 ДДУ/ 144 кв. и  39 н/п		
10	ООО СЗ «СК Энергожилстрой-МКР»
Асламова Валерия Станиславовна	672015, г.Чита, Агинский тракт, влад.28, стр.15
ИНН 7536188981	«Многоквартирный жилой дом (№6 по ППТ), расположенный по адресу :г. Чита, мкр. Романовский»
Адрес: мкр.Романовский, 32	договор субаренды 284/23 от 5.04.2023 сроком до 1.12.2041.
кадастровый номер земельного участка: 75:32:010223:947, S=7 739 кв.м.	№Р057-00154-77/01369285 от 30.08..2024 г. сроком до 31.07.2025, продлен до 31.12.2026.	наш дом рф 04.12.2024	4 кв. 2026	Выполнено: 
секция 1 и 2 - 10 этажей.
секция 3 – 8 этажей
секция 4 – 7 этажей.
Работы ведутся.	192кв.

124 ДДУ/124 кв.	г. Чита, мкр.Романовский,30, 
 корпус 1 и корпус 2;.
мкр. Романовский, 28, 29,31	
			«Многоквартирный жилой дом (№4 по ППТ), расположенный по адресу :г. Чита, мкр. Романовский»
Адрес: мкр.Романовский, 25	договор субаренды 204/24 от 10.04.2024 сроком до 1.12.2041.
кадастровый номер земельного участ-ка:  
75:32:010223:970, S=3 494 кв.м.	№Р057-00154-77/04597456 от 18.03.2026 до 19.11.2026	наш дом рф 24.03.2026	4 кв. 2027	Ведутся подготовительные работы.	86 кв.

0 ДДУ/0 кв.		
11	ООО «СЗ «Победа»
Тютюнник Максим Олегович	672007, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД ЧИТА, Г ЧИТА, УЛ БАЛЯБИНА, Д. 75, СТР. 8
ИНН 7500016636	Многоквартирные многоэтажный жилой дом по ул.Кочеткова,76	В собственности земельный участок  75:32:030701:69.                                       Договор купли-продажи земельного участка от 7.02.2024.	№92-RU92303000-176-2020 от 25.11.2020 до 25.01.2025; продлено 20.12.2024 до 30.09.26	наш дом рф 15.03.2024	3 кв. 2026	Выполнено: каркас 100%, перегородки 100%, штукатурка 25%, электромонтажные работы 90%, остекление 86%, утепление фасадов 30%, сантехнические работы 40%
Выполнятся работы по устройству кровли, внутренней отделке.	174 кв
.
168 ДДУ/168 кв.	нет	
12	ООО СЗ «СК ЭЖС-Чита»
Лопатин Виктор Алексеевич	672000, г.Чита,, ул.Балябина,  13, пом.502
ИНН 7536076903	Многоквартирный  жилой дом с подземной автостоянкой по 
ул.Проезжая в г.Чита
Адрес: ул.Проезжая,4	Договор купли-продажи земельного участка
Кадастровый номер  75:32:030759:1122
Площадь 5993 кв.м	№75-32-80-2024 от 16.09.2024 до 16.06.2026	наш дом рф 24.09.2024	3 кв. 2026	Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме.
Выполняется благоустройство.	126 кв. и 103 н/п

195 ДДУ/119 кв. и  76 н/п	Ул.Бабушкина 10, секция 1 и 2; ул. Виля Липатова,13	
13	ООО СЗ 
«Тантал» 
Сальников Сергей  
Владимирович	672027,
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,
г. ЧИТА,
ул. Нагорная,
д. 26        
ИНН 7536004747	«Многоквартирный  жилой дом с подземной автостоянкой по ул.Кочетккова,56»	Договоры купли-продажи земельных участков.
Кадастровый номер  75:32:030705:823
Площадь 2100 кв.м	№75-32-67-2024 от 07.08.2024 до 07.07..2025, продлено до 07.07.2026	наш дом рф 09.01.2025	3 кв. 2027	Выполнен фундамент.
 Выполнен каркас 11-го этажа и кладка 8-го этажа, выполнены штукатурка и стяжка 2-х этажей.
Работы ведутся.	142 кв. и 27 м/м
/
142 ДДУ/118 кв. и 24 м/м	МЖД по ул. Нагорная 26, 
ул. Кочеткова 53,
ул. Богомягкова, 55,  107,
ул. Анохина, 93, 
Бутина, 78, 
ул. Новобульварная, 38,
ул.Кастринская,9
ЖК в районе 
ул. Усуглинская, 2.
ЖК по ул. Богомягкова-Кочеткова 
ЖК по проспекту Жукова  Тимирязева 23 1 и 2 этап, Новобульварная 40, Кр.Коммунаров,1	
			Многоквартирный  жилой дом с нежилыми помещениями по ул.  Богомягкова,101	Земельный участок в собственности
Кадастровый номер  75:32:030705:824
Площадь 3900 кв.м	№75-32-32-2025 от 6.03.2025 до 6.01.2027	наш дом рф 07.07.2025	4 кв. 2027	Выполнен фундамент.
 Выполнен каркас 11-го этажа и кладка 8-го этажа, выполнены штукатурка и стяжка 2-х этажей
Работы ведутся.	174 кв. и 7 н/п

142 ДДУ/136 кв. и 6 н/п		
14	ООО СЗ
 «Ракета»
 Плаксин
 Владимир Александрович	672042,
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,
г. ЧИТА,
ПРОЕЗД ИВАНОВСКИЙ,
д. 10,
пом 15 
ИНН 7536137994	Группа жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 75:32:020141:5 (Дом №9)
адрес: г. Чита, Ангарская,4	Договор аренды земельных участков. 
Срок до 14.11.2030г.
Кадастровый номер  75:32:020141:265
Площадь 2322 кв.м	№75-32-10-2025 от 23.01.2025 до 23.10.2025, 
продлено до 23.10.2026	наш дом рф 10.02.2025	4 кв. 2026	Перекрыто 9 этажей кирпичной кладкой, внутренние перегородки - 100%, кровля - 100%, остекление окон -100%, отопление, вентиляция - 100%, электромонтажные работы-90%, слаботочные сети, пожарная сигнализация - 90%, предчистовая отделка квартир - 100%, чистовая отделка МОПов-5% .	108 кв./ 
                        56 ДДУ/56 кв.	нет	
			Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Забайкальский край, г.Чита, ул. Нерчинско-Заводская, участок с кадастровым номером 75:32:020141:240,
Адрес: г. Чита, мкр. Квартал Мира,5	Договор аренды земельных участков. 
Срок до 14.11.2030г.
Кадастровый номер  75:32:020141:240
Площадь 2032 кв.м	№75-32-23-2025 от 14.02.2025 до 14.08.2028	наш дом рф 28.05.2025	4 кв. 2026	Выполнены фундамент и работы ниже 0- уровня. 
Перекрыто 9 этажей кирпичной кладкой, внутренние перегородки - 100%.	90 кв. 
53 н/п/
 
59 ДДУ/
41 кв. и 18 н/п		
			Группа жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 75:32:020141:5 (Дом №8)
адрес: г. Чита, Нерчинско-Заводская,3	Договор аренды земельных участков. 
Срок до 14.11.2030г.
Кадастровый номер  75:32:020141:264
Площадь 4616 кв.м	№75-32-11-2025 от 23.01.2025 до 23.10.2025, 
продлен до 13.10.2026	наш дом рф 21.02.2025	1 кв. 2027	Выполнен фундамент и тех. этаж. Выполнено:
Перекрыто 9 этажей, внутренние перегородки - 100%..	195 кв.
111 н/п
/                       99 ДДУ/
81 кв. и 18 н/п		
			Многоквартирный жилой дом №7, расположенный по адресу: Забайкальский край, г.Чита, ул. Нерчин-ско-Заводская, участок с кадастровым номером 75:32:020141:263,
Адрес: г. Чита, мкр. Квар-тал Мира,4	Договор аренды земельных участков. 
Срок до 14.11.2030г.
Кадастровый номер  75:32:020141:263
Площадь 2288 кв.м	№75-32-22-2025 от 14.02.2025 до 14.08.2027	наш дом рф 18.09.2025	2 кв. 2027	Перекрыто 2 этажа 	90 кв.
48 н/п

88 ДДУ/
82 кв. и 6 н/п		
15	ООО СЗ 
«Домостроительный 
комбинат» Бирюков 
Александр Борисович	672015,
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,
Г ЧИТА,
ТРАКТ АГИНСКИЙ,
ВЛД. 25, СТР. 3
ИНН 7500008547	«Жилой комплекс "Серебряный бор" г. Чита 2 этап строительства: жилой дом №1 по ГП 1 очередь строительства в осях 1-4»
Адрес: г.Чита, мкр.Серебрянный бор, д.4	Договор аренды земельного участка б/н от 22.07.2025. Срок до 31.12.2028 г.
Кадастровый номер  75:32:020105:761
Площадь 29 721 кв.м	№75-32-1-2026 от 29.01.2026 до 29.12.2026	наш дом рф 27.02.2026	2 кв. 2027	Выполнен фундамент.  
Ведутся работы по монтажу цокаля. 	124 кв.
1 н/п

0 ДДУ/
0 кв.	ул.Богдана Хмельницкого,14, ул.Богдана Хмельницкого,16	
			«Жилой комплекс «Серебрянный бор» г.Чита: 2 этап строительства,: жилой дом №7 по ГП»
Адрес: г.Чита, мкр.Серебрянный бор, д.7	Договор аренды земельного участка б/н от 22.07.2025. Срок до 31.12.2028 г.
Кадастровый номер  75:32:020105:761
Площадь 29 721 кв.м
	№75-32-100-2025 от 10.10.2025 до 10.10.2028	наш дом рф 7.12.2025	4 кв. 2027	Выполнен фундамент.
Выполнен каркас 1-9 этаж.
Выполнен монтаж полипропилена 1-3 этаж.
Ведутся работы по монтажу теплового узла, монтаж тепловых магистралей.	70 кв.

0 ДДУ/ 0 кв.		
			«Жилой комплекс «Серебрянный бор» г.Чита, подземная автостоянка №1 на 28  машиномест».
Адрес: г.Чита, мкр.Серебрянный бор, д.3, сооружение 1	Договор аренды земельного участка б/н от 22.07.2025. Срок до 31.12.2028 г.
Кадастровый номер  75:32:020105:761
Площадь 29 721 кв.м	№75-32-90-2025 от 19.09.2025 до 19.09.2026	наш дом рф 6.12.2025	2 кв. 2027	Выполнен котлован.
Выполнен каркас полностью.	28 н/п

0 ДДУ/ 0 кв.		
			«Жилой комплекс «Се-ребрянный бор» г.Чита: 2 этап строительства,: жилой дом №4 по ГП»
Адрес: мкр.Серебрянный бор,3	Договор аренды земельного участка б/н от 22.07.2025.Срок до 31.12.2028 г.
Кадастровый номер  75:32:020105:761
Площадь 29 721 кв.м	№75-32-80-2025 от 18.08.2025 до 18.08.2027	наш дом рф 27.08.2025	2 кв. 2026	Выполнен фундамент.
Выполнен каркас 1-9 этаж.
Установлены окна 1-9 этаж.
Ведутся отделочные работы. Техническое присоединение выполнено.	62 кв.
1 н/п

19 ДДУ/ 
19 кв. и 0 н/п 		
16	ООО СЗ «Стройсфера» Будаева Юлия Алексеевна	672039,
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,
г. ЧИТА,
ул.ГАГАРИ-НА,д. 10А,  1
ИНН 7536181947	«Многоквартирный  жи-лой дом по адресу: г. Чита, пер. Парковый, дом 15»	Договор купли-продажи земельного участ-ка от 02.03.2023.
Кадастровый номер  75:32:020124:167
Площадь 2652 кв.м	№75-32-112-2024 от 28.12.2024 до 28.10.2025, продлено 14.10.2025 до 30.11.2026	наш дом рф 28.03.2025	3 кв. 2026	Выполнена кладка 7-го этажа. 
Ведутся работы по возведению 8 этажа из 9. Внутри здания проводятся работы по монтажу системы водоснабжения, водоотведения и отопления, электромонтажные работы, стяжка полов.	90 кв.
17 н/п

35 ДДУ/ 
32 кв. и  3 н/п	г.Шилка, ул.Балябина,129
г.Чита, пер.Парковый 14	
17	ООО СЗ «Проект-С-47» Боган  Константин Михайлович	672038,
г. ЧИТА,
МКР КАШТАКСКИЙ,
Д. 1,
ПОМЕЩ. 3
ИНН 7500014558	Комплексная застройка мкр. Дальневосточный квартал в границах ул.Ковыльная-Железобетонная на территрории гюЧита, 1 очередь строительства
Корпус 1.1
Адрес: г.Чита, ул.Железобетонная-пер. Зоотехнический	Договор субаренды земельного участка 45/24 от 01.02.2024. 
Срок до 18.01.2034
 Кадастровый номер  75:32:000000:4205
Площадь 42 135 кв.м 
Кадастровый номер  75:32:000000:4233
Площадь 49 580 кв.м	№75-32-877-2024-МБР от 5.08.2024 до 6.08.2027	наш дом рф 12.08.2024	3 кв. 2026	Завершены монолитные работы, кладочные работы, монтаж окон, устройство кровли.
Производятся работы по внутренним сетям:
Отопление -2 этаж.
Вода и канализация -4 этаж.
Отделка - тех. помещений.
В ближайшее время приступают к фасадным работам.	144 кв. и 6 н/п/

97 ДДУ/96 кв. и 1 н/п	нет	
			Корпус 1.2
Адрес: г.Чита, ул.Железобетонная-пер. Зоотехнический		№75-32-877-2024-МБР от 5.08.2024 до 6.08.2027	наш дом рф 12.08.2024	3 кв. 2026	Завершены монолитные работы, кладочные работы, монтаж окон, устройство кровли.
Производятся работы по внутренним сетям:
Отопление -3 этаж.
Вода и канализация -5 этаж.
Отделка - тех. помещений.
В ближайшее время приступают к фасадным работам.	144 кв. и 7 н/п
/
72 ДДУ/72 кв.		
			Корпус 1.3
Адрес: г.Чита, ул.Железобетонная-пер. Зоотехнический		№75-32-877-2024-МБР от 5.08.2024 до 6.08.2027	наш дом рф 12.08.2024	3 кв. 2026	Завершены монолитные работы, кладка наружных стен, остекление с 2-го по 17 этаж. Завершены работы по кладке внутренних перегородок, устройству кровли.
Производятся работы по внутренним сетям:
Отопление -5 этаж.
Электрика-2 этаж.
Вода и канализация-9 этаж.
Отделка - тех. помещений.
В ближайшее время приступаем к фасадным работам.	144 кв и 7н/п
./
2 ДДУ/144 кв..		
			Корпус 1.4
Адрес: г.Чита, ул.Железобетонная-пер. Зоотехнический		№75-32-877-2024-МБР от 5.08.2024 до 6.08.2027	наш дом рф 12.08.2024	3 кв. 2026	Завершены монолитные работы, кладка наружных стен, остекление с 2-го по 17 этаж. Завершены работы по кладке внутренних перегородок, устройству кровли.
Производятся работы по внутренним сетям:
Отопление - 4 этаж.
Электрика -2 этаж.
Вода и канализация - 8 этаж.
Отделка - тех. помещений.
В ближайшее время приступают к фасадным работам.	144 кв. и 6 н/п/

9 ДДУ/82 кв.		
			2 очередь строительства
Корпус 2.1
Адрес: г.Чита, ул.Железобетонная-пер. Зоотехнический		№Р057-00154-77/02427740 от 6.06.2025 до 7.07.2027	наш дом рф 11.08.2025	3 кв. 2027	Завершены работы по устройству фундаментной плиты, вертикальных конструкций цокольного этажа, плиты цокольного этажа.
Производятся монолитные работы – 1 этаж.	192 кв.
46 н/п

25 ДДУ/ 
25 кв. и 0 н/п		
			2 очередь строительства
Корпус 2.2-2.3
Адрес: г.Чита, ул.Железобетонная-пер. Зоотехнический		№Р057-00154-77/02427740 от 6.06.2025 до 7.07.2027	наш дом рф 11.08.2025	3 кв. 2027	Производятся земляные работы (замена грунта с уплотнением)	240 кв.
71 н/п

1 ДДУ/ 
1 кв. и 0 н/п		
			2 очередь строительства
Корпус 2.4
Адрес: г.Чита, ул.Железобетонная-пер. Зоотехнический		№Р057-00154-77/02427740 от 6.06.2025 до 7.07.2027	наш дом рф 11.08.2025	3 кв. 2027	Завершены работы по устройству фундаментной плиты, вертикальных конструкций цокольного этажа, плиты цокольного этажа. 
Производятся монолитные работы – 1 этаж.	192 кв.
48 н/п

18 ДДУ/ 
18 кв. и 0 н/п		
18	ООО «СЗ «Основа ДВ»	672022, Забайкальский край, г Чита, проезд Энергостроителей, д. 10 ИНН 7500013152	Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями общественно-делового, коммерческого назначения и поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная "Жилой дом со встроенными помещениями общественно-делового и коммерческого назначения на первом этаже здания", поз.3.1
Адрес: Чита, пер.4-й Амурский,1	Договор аренды земельного участка № 221/24 от 26.06.2024 до 18.01.2029
Кадастровый номер   75:32:000000:4612
Площадь 5 573 кв.м	№75-32-110-2024 от 25.12.2024 до 25.09.2027	наш дом рф 03.07.2025	3 кв. 2027	Выполнены испытания забитых свай.
Принято конструктивное решение о применении свай увеличенной длинны. 
Выполняется забивка контрольных свай с последующими испытаниями.	196 кв.
88 н/п

47 ДДУ/ 
47 кв. и 0 н/п	нет	
			 «Жилой дом со встроенными помещениями общественно-делового и коммерческого назначения на первом этаже здания и встроенно-пристроенным поликлиническим учреждением», поз. 2.2-2.3
Адрес: Чита, пер.4-й Амурский,3	Договор аренды земельного участка №222/24 от 26.06.2024, срок до 18.01.2029
Кадастровый номер   75:32:030630:140
Площадь 4 624 кв.м	№75-32-36-2025 от 14.03.2025 до 14.01.2028	наш дом рф 22.09.2025	4 кв. 2027	Ведется разработка котлована под фундаментную плиту	196 кв.
50 н/п

0 ДДУ/ 
0 кв. и 0 н/п		
			«Жилой дом со встроенными помещениями общественно-делового и коммерческого назначения на первом этаже здания», поз. 2.1»
Адрес: Чита, пер.4-й Амурский,5	Договор аренды земельного участка №222/24 от 26.06.2024, срок до 18.01.2029
Кадастровый номер    75:32:030630:139
Площадь 6 599 кв.м	№75-32-2-2025 от 14.01.2025 до 14.11.2027	наш дом рф 22.09.2025	3 кв. 2027	Ведется разработка котлована под фундаментную плиту	252 кв.
61 н/п

0 ДДУ/ 
0 кв. и 0 н/п		
ИТОГО	18 застройщиков – 47 объектов капитального строительства 	3834 ДДУ / 4083 кв. и 427 н/п