Сведения
о застройщиках и объектах капитального строительства, строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства
по состоянию на 30 июня 2026 года (по сведениям, размещаемым застройщиками в ЕИСЖС).
	
№ п/п	Наименование застройщика Ф.И.О. руководителя	Реквизиты застройщика 	Наименование объекта стр-ва, адрес	Правоустанавливающие документы на земельный участок (наименование документа, дата, №, дата гос.регистрации срок действия)	Разрешение на строительство (дата, №, срок действия)	Проектная декларация, место, дата 
размещения	Срок ввода объекта	Состояние объекта	Кол-во сам-ных частей (по проекту)
/
 кол-во ДДУ	Объекты, строительство которых ранее осуществлял застройщик	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ООО Специализированный застройщик «Радченко»
Прищепова Наталья 
Михайловна	г. Чита, 
ул. Бабушкина,108, 
помещение 15 ИНН 7536056600 тел. 40-09-75	«Многоквартирный жилой дом и подземная автостоянка по ул.Кайдаловская,45» 	договор аренды земельного участка 
№ 151/22 от 21.04.2022 г.; 
дог. переуступки 
№ФРТ-06/35-23 от 7.02.2023; 
бессрочный; 
Кадастровый номер 
земельного участка: 
75:32:000000:158, S=6472 кв.м.	№ 75-RU303000-69-2008 
дата выдачи 17.03.2008. 
Продлено до 09.12.2027	Наш.дом.рф 13.09.2024	3 квартал 
2026 года	1 секция — завершены работы ниже 0,000,
кирпичная кладка — завершена,
установка окон — завершена,
электрика - завершена
сантехника - со 2 по 14 этаж,
штукатурка стен - со 2 по 14 этаж,
стяжка пола — со 2 по 14 этаж,
остекление лоджий — со 2 по 14 этаж,
кровля — выполнена
2 секция — завершены работы ниже 0,000, 
кирпичная кладка — завершена,
установка окон — завершена,
электрика - завершена
сантехника - со 2 по 14 этаж,
штукатурка стен - со 2 по 14 этаж,
стяжка пола — со 2 по 14 этаж,
остекление лоджий — со 2 по 14 этаж,
кровля — 90%
3 секция — завершены работы ниже 0,000, 
кирпичная кладка — завершена,
установка окон — завершена,
электрика - с 1 по 10 этаж.
сантехника - со 2 по 5 этаж,
штукатурка стен - со 2 по 12 этаж,
стяжка пола — со 2 по 3 этаж.
Работы ведутся.	Кв. 348 
20 н/п

146дду/146 кв.	Многоквартирные жилые дома по улицам:
Подгорбунского,55, 55 а, 57,
Гладкова,8,
Шилова, 19, 20, 22 
в мкр. Северный,47, ул. Кирова, 39, 41, 41а
Административное здание по ул. Анохина, 91	
2	ООО СЗ 
«Голд
ГеоПром»  Тютюнник Максим 
Олегович	672038,
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,
ГОРОД ЧИТА,
МИКРОРАЙОН КАШТАКСКИЙ, ДОМ 1
ИНН 7536170310	Многоквартирный жилой дом ГП-1 
со встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями и  подземным паркингом по: Забайкальский край , г.Чита, мкр.Каштакский
Адрес: г.Чита, мкр.Каштакский,10, 
1 и 2 этап	Договор субаренды №470/24 от 11.07.2024 сроком до 18.02.2035
Кадастровый номер 75:32:030523:1013
Площадь 21 896 кв.м.	№Р057-00154-77/01304696 от 19.07.2024 до 20.07.2027	Наш.дом.рф 2.08.2024	4 квартал 2026	1.1 секция – каркас 100%, фасад — 90%, окна — 99%, кладка -100%, перегородки -100%, черновые полы — 95%, отделка 80%, электромонтажные работы — 95%, отопление - 100%, водоснабжение – 90%, канализация – 100%, вентиляция — 90 %, кровля- 95%.;
 1.2 секция – каркас 98%, перегородки – 55%, отделка 15%, окна – 22%, кладка – 80%, электромонтажные работы – 20% вентиляция 37%, отопление - 25%, водоснабжение – 10%, канализация – 15%.
 1.3 секция – каркас 100% перегородки – 55%, окна 18%, кладка 85%, отделка 25%, вентиляция 20%,  электромонтажные работы 30,  отопление - 25%, водоснабжение – 10%, канализация – 15%.
1.4 секция - каркас 100%, кладка -100%, перегородки- 100%, черновые полы — 95%, отделка 80%, электромонтажные работы — 90%, отопление - 100%, водоснабжение – 90%, канализация – 100%, вентиляция — 97 %, кровля-95%;
 1.5 секция – каркас 100%, кладка 20%;
 1.6 секция – каркас 100%, кровля 65%;
 1.7 секция – каркас 100%, кровля 65%.
 
 Ведутся работы по устройству наружных сетей: теплоснабжения – 95%, канализация — 88%, вода-85%	528 кв и 380 н/п/
                      564 ДДУ/464 кв. и 100 н/п	МКД №1, 3, 4 
в мкр. Каштакский	
			Многоквартирный жилой дом по улице Брызгалова адрес: г.Чита, ул. Алексея Брызгалова,14	Договор купли-продажи земельного участка от 27.02.2024.                                               Кадастровый номер земельного участка: 75:32:040507:4681, S=2 852 кв.м.	№75-32-62-2024 от 26.07.2024 до 26.07.2028	Наш.дом.рф 26.08.2024	3 квартал 2026	Не в полном объеме выполнены работы по фасаду, отделке и благоустройству территории	276 кв. и 16 н/п/ 
                         3 ДДУ/276 кв. и  0 н/п		
3	АО СЗ «Региональное управление строительства»
Филонич Сергей Александрович	672007,г. Чита, ул. Чкалова , д. 158, ИНН 7530008329, тел. 26-52-29	Многоэтажный многоквартирный жилой дом с наземной автостоянкой открытого типа по ул.Костюшко-Григоровича, 55 в г.Чите	Земельный участок в собственности застройщика.
Кадастровый номер земельного участка: 75:32:030662:322, S=5 202 кв.м	№75-32-109-2024 от 25.12.2024 до 25.12.2027	Наш.дом.рф 9.01.2025	4 квартал 2027	Выполнены СМР 1-16-ый этаж
Ведутся работы по отделке квартир, мест общего пользования, по монтажу оконных и балконных блоков, остеклений лоджий, сантехнические и электромонтажные работы.	222 кв. 
69н/п
/

209ДДУ/
148 кв. 
61 н/п	МЖД №№ 1, 4, 10, 7, 5, 9, 6 
в мкр-н Октябрьский, 
МКД
по ул. Ингодинской, 30,
ул. Нечаева, 66,
ул. Красноармейская, 14,
ул. Красной Звезды,55, 57,
ул. Чкалова, 123,
в мкр. Северный, 71а,
МКД № 11, 12, 13,
в мкр. Царский, 
МКД по 
ул. Шилова, 43,
ул. Народная, 39
ул.Алданская,11
ул.Бабушкина,4
ул.Курнатовского,70
Детский сад № 8,
Матвеева 10,
Токмакова 35,39,41,43,45, 47,48,49,50; 
Ивана Артеменко,1, 5, 7, ул.Ленина,150, 
ул.Кастринская,31
Парковка по ул.Кастринская,33,
Ул.Чайковского,43.	
			Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениямипо ул. Народная, 35 
в  г.Чите	договор аренды земельного участка от 31 марта 2025г. № 103/25 (г.с.).                             Срок до 30.03.2034г.
Кадастровый номер земельного участка: 75:32:000000:5014, S=7 216 кв.м	75-32-54-2025 от 15.05.2025 сроком до 15.05.2028	наш.дом.рф 22.05.2025	4 квартал 2028 года	Выполнен фундамент.
Выполнено 16 этажей.
Ведутся работы по устройству кирпичной кладки на уровне 16 этажа.
Установлены  окна до уровня 13 этажа.
 Работы ведутся.	189 кв.
31 н/п 

106 ДДУ
/93 кв.
13 н/п		
			Многоквартирный много-этажный жилой дом с нежилыми помещениями-по ул. Народная, 33 в  г.Чите	договор аренды земельного участка от 31 марта 2025г. № 104/25 (г.с.).                             Срок до 30.03.2034г.
Кадастровый номер земельного участ-ка:  75:32:000000:5015 , S=8 443кв.м	75-32-104-2025 от 17.10.2025 сроком до 17.10.2028	наш.дом.рф 22.05.2026	4 квартал 2028 года	Выполняется устройство фундамента	189 кв.
31 н/п

0 дду/ 0 кв.
		
			Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г.Чита, ул. Петровско-Заводская,30	Земельный участок в собственности.
Решение о перераспределении земельных участков от 17.07.2025
Кадастровый номер земельного участка:  75:32:020119:796, S=4 767 кв.м.	75-32-69-2025 от 18.07.2024 сроком до 17.07.2028	наш.дом.рф 24.07.2024	3 квартал 2028 года	Выполнены работы по устройству фундамента.
Завершена работа по устройству кирпичной кладки на уровне пятого этажа.
Работы ведутся.	238 кв., 
91 н/пом. 
 94 м/м

104 ДДУ/
50 кв. и 54 н/п		
4	ООО СЗ «Атолл»
Колесник Артем Юрьевич	109029, Москва, ул. Нежигородская, д.32, стр. 15А, к. 11, офис 117-2, ИНН: 7719673738	Жилой мкр.Хороший по адресу: г.Чита, район озера Кенон, 3-я очередь строительства, 2 этап , Адрес: мкр.Хороший,17	Договор субаренды 196/20/0 от 06.05.2022 до 24.12.2029.
Кадастровый номер 75:32:010676:53.     Площадь 14 5760 кв.м	№ 75-32-845-20224-МВР от 28.08.2024 до 29.04.2026, продлен до 29.10.2027	наш.дом.рф 26.08.2024	4 квартал 2026 года	Выполнены работы ниже уровня 0. 
Выполнен: каркас 1-12 этажа, кладка стен 2-9 этаж, кладка вентблоков 2-10 этаж, монтаж окон 2-3 этаж.
Работы ведутся.	306 кв. 
51 н/п/    

147 ДДУ/             147 кв. и 0 н/п	МКД
ул. Магистральная, д. 102, 106, 110;

мкр.Хороший,9, 10, 12, 14	
			Жилой мкр.Хороший по адресу: г.Чита,район озера Кенон, 3-я очередь строительства, 3 этап                Адрес: мкр.Хороший,16	Договор субаренды 196/20/0 от 06.05.2022 до 24.12.2029.
Кадастровый номер 75:32:010676:53.     Площадь 14 5760 кв.м	№ 75-32-846-20224-МВР от 28.08.2024 до 29.03.2025, продлено до 29.12.2027	наш.дом.рф 26.08.2024	4 квартал 2026 года	Выполнены работы ниже уровня 0.
Полностью выполнен каркас здания. Выполнена кладка газоблоков 2-10 этажа. Выполнена штукатурка до 4 этажа. Выполнена кровля 100%.
Работы ведутся.	75 кв. 
27 н/п
 /                                       40 ДДУ/ 
39 кв. и 1 н/п		
			Жилой мкр.Хороший по адресу: г.Чита,район озера Кенон, 3-я очередь строительства, 1 этап ,  литер 1
Адрес: мкр.Хороший,15
Литер 4 (парковка)
Адрес:мкр.Хороший,17	Договор субаренды 196/20/0 от 06.05.2022 до 24.12.2029.
Кадастровый номер 75:32:010676:53     Площадь 14 576 кв.м	75-32-844-2024-МВР от 28.03.2024 до 29.04.2026, продлен до 29.10.2027	Наш.дом.рф 21.05.2024	4 квартал 2026 года	на объектах выполняются строительно-монтажные работы.	456 кв. и 75 н/п/;  
133 м/места на автостоянке/

270 ДДУ/ 268 кв. и 2 н/п		
5	ООО Специализированный застройщик «ЗАБВО»
Тютюнник Максим Олегович	672038, г.Чита, мкр. Каштакский, д.3,кв.4   тел.  8924-819-0789
ИНН  7500016450	Многоквартирный жилой дом по ул. Токмакова 30 (с автостоянкой)	Договор аренды земельного участка от   27.10.2025г. №336/25(онс). Срок до 26.10.2028 
Кадастровый номер 75:32:030721:675      Площадь 5 813 кв.м  	№75-RU303000-73-2008 от 25.03.2008 ,  продлено 10.02.2026 до 26.10.2026.	наш.дом.рф 28.08.2024	3 кв. 2026 - дом; 
1 кв. 2028 - автостоянка	Не в полном объеме выполнены работы по фасаду, отделке и 
благоустройству территории	 101 кв.
86 н/п
                           104 ДДУ/ 
88 кв.,
16 н/пом.	нет	
6	ООО СЗ «Инновация»
Кузьмицкий Леонид Сергеевич	9-е Январчя, 37. 
Пом. 402, 
ИНН 7536047400	Многоквартирный жилой дом г.Чита, ул. Мысовская  земельный участок кадастровый номер 75:32:010404:939
Адрес: г.Чита, ул.Мысовская, 31 б      	Договор аренды земельного участка от 23.10.2025 №20/25 сроком до 22.12.2031
Кадастровый номер  75:32:010406:939       Площадь 2 638 кв.м  	75-32-40-2026 от 4.05.2026 сроком до 12.05.2027	наш.дом.рф 25.05.2026	4 кв. 2027	Ведутся работы по устройству фундамента	48 кв. и 52 н/п

0 дду/0 кв.	пгт.Новая Чара, ул.Белорусская,5; пгт.Новая Чара, ул.Белорусская,5а	
7	ООО СЗ «Трансстройдевелопмент Развитие» Куницкий
Евгений
Александрович	672014, г.Чита, ул.Олимпийская,,27Б,стр.3
ИНН  7500016731 	Многоквартирный жилой квартал» зем.участок №75:32:080347:648» 1 этап, 1-я очередь»
Адрес:г.Забайкальск,                        ул.Южная,д2	Договор субаренды земельного участка, выдан 28.02.2024. Срок до 07.07.2028.
Кадастровый номер 75:06:080347:648
Площадь 24 277 кв.м	№92-RU92508101-11-2024 от 27.06.2024 до 27.06.2026	наш дом рф 20.08.2024	2 кв. 2026	Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме.
Получено заключение о соответствии построенного объекта проектной документации (ЗОс)	124 кв.

30 ДДУ/ 93 кв.	пгг.Забайкальск,                        ул.Южная,д.6а/1	
8	ООО СЗ «Трансстройдевелопмент» Куницкий
Евгений
Александрович	690062, г.Владивосток, ул.Днепровская, 107, офис 4 инн 2543166718	«Жилой микрорайон по адресу: Забайкальский край, г.Чита, мкр. №7, земельный участок №75:32:040511:5730, 2 этап, 2 очередь строительства»,
Аадрес: г.Чите, проспект Маршала Жукова,6	Доп. соглашение к договор субаренды №б/н от 21.03.2025 сроком до 24.02.2030.
Кадастровый номер  75:32:040511:5730
Площадь 20 269 кв.м	75-32-46-2025 от 16.04.2025 г до 16.06.2027	наш дом рф 7.05.2025	2 кв. 2027	Выполнены работы по устройству котлована, фундамента.
Выполняются СМР:
Выполнены фундаменты. Ведутся монолитные работы и кладка стен
1 секции - 5 этаж, во 2 секции - 5 этаж. в 3 секции — 4, этаж, в 4 секции
— 6 этаж
Кладка – 3 этажа все секции.	304 кв. и 34 н/п

233 ДДУ/ 233 кв. и 0 н/п	Маршала Жукова,8, 9	
			Жилой микрорайон по адресу: Забайкальский край, г.Чита, мкр.№7, земельный участок 75:32:040511:48, 1 этап, 2 очередь строительства
Адрес: г.Чита, пр-кт. Маршала Жукова,7	Договор субаренды №б/н от 18.07.2022 сроком до 24.02.2030.
Кадастровый номер 75:32:040511:48
Площадь 250 053 кв.м	75-32-68-2024 от 08.08..2024 г до 08.10.2026	наш дом рф 31.10.2024	2 кв. 2026	на объекте не в полном объеме выполнены работы по благоустройству	291 кв. и 141 н/п

326 ДДУ/ 287 кв. и 39 н/п		
9	ООО СЗ 
Мир Инвест» Дудкина Елена Анатольевна	672020, г.Чита, ул. Промышленная, влд.7, пом.192
ИНН  75361814185	«Многоквартирный жилой дом с переменной этажностью по ул. Бабушкина», расположенный по адресу: г.Чита, ул.Проезжая,3	Договор субаренды земельного участка 57 от 9.04.2024 сроком до 30.07.2027.
Кадастровый номер  75:32:030758:664
Площадь 3 801  кв.м	75-32-93-2024 от 22.10.2024 до 13.10.2026	наш.дом.рф 01.11.2024	1 кв. 2027	Выполнены работы ниже 0-уровня.
Выполнены: 
Каркас здания - 100%, кирпичная кладка перекрыто: 1 секция-9 этажей, 2,3 секция - 10 этажей, штукатурка стен - 10%, электрика - 15%, пожарная сигнализация - 10%, вентиляция - 30%, отопление, водоснабжение, канализация - 5%. 
Работы ведутся	202 кв. и 123 н/п

214 ДДУ/ 173 кв. и  41 н/п	г.Чита, ул.Проезжая,1а 	
10	ООО СЗ «СК Энергожилстрой-МКР»
Асламова Валерия Станиславовна	672015, г.Чита, Агинский тракт, влад.28, стр.15
ИНН 7536188981	«Многоквартирный жилой дом (№6 по ППТ), расположенный по адресу :г. Чита, мкр. Романовский»
Адрес: мкр.Романовский, 32	договор субаренды 284/23 от 5.04.2023 сроком до 1.12.2041.
кадастровый номер земельного участка: 75:32:010223:947, S=7 739 кв.м.	№Р057-00154-77/01369285 от 30.08..2024 г. сроком до 31.07.2025, продлен до 31.12.2026.	наш дом рф 04.12.2024	4 кв. 2026	Выполнено: 
Каркас, кровля, кладка – 100%
Установка окон – 100%
Работы ведутся.	192кв.

161 ДДУ/161 кв.	г. Чита, мкр.Романовский,30, 
 корпус 1 и корпус 2;.
мкр. Романовский, 28, 29,31	
			«Многоквартирный жилой дом (№4 по ППТ), расположенный по адресу :г. Чита, мкр. Романовский»
Адрес: мкр.Романовский, 25	договор субаренды 204/24 от 10.04.2024 сроком до 1.12.2041.
кадастровый номер земельного участ-ка:  
75:32:010223:970, S=3 494 кв.м.	№Р057-00154-77/04597456 от 18.03.2026 до 19.11.2026	наш дом рф 24.03.2026	4 кв. 2027	Ведутся работы по устройству котлована..	86 кв.

11 ДДУ/11 кв.		
11	ООО «СЗ «Победа»
Тютюнник Максим Олегович	672007, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД ЧИТА, Г ЧИТА, УЛ БАЛЯБИНА, Д. 75, СТР. 8
ИНН 7500016636	Многоквартирные многоэтажный жилой дом по ул.Кочеткова,76	В собственности земельный участок  75:32:030701:69.                                       Договор купли-продажи земельного участка от 7.02.2024.	№92-RU92303000-176-2020 от 25.11.2020 до 25.01.2025; продлено 20.12.2024 до 30.09.26	наш дом рф 15.03.2024	3 кв. 2026	Выполнено: каркас 100%, перегородки 100%, штукатурка 28%, электромонтажные работы 92%, остекление 93%, утепление фасадов 35%,  сантехнические работы 90%, кровля 40%, стяжка полов 60%, наружная канализация 90%, наружное водоснабжение 0%, наружное теплоснабжение 0%
Выполнятся работы по устройству кровли, внутренней отделке.	174 кв
.
169 ДДУ/169 кв.	нет	
12	ООО СЗ «СК ЭЖС-Чита»
Лопатин Виктор Алексеевич	672000, г.Чита,, ул.Балябина,  13, пом.502
ИНН 7536076903	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественно-делового и коммерческого назначения (Секции С2 и С3), расположенный по адресу: г. Чита, мкр. Северный, 64. Подземный паркинг, расположенный по адресу: г. Чита, мкр. Северный, 64	Договор купли-продажи земельного участка б/н от 11.09.2023
кадастровый номер земельного участ-ка:  75:32:030605:1622, S=8 940 кв.м.	75-32-20-2026 от 23.03.2026 до 23.02.2028	наш дом рф 31.03.2026	1 кв. 2028	Выполнен фундамент.
 Выполнен каркас 4-го этажа..
Работы ведутся.	177 кв. и 109 н/п

0 дду/0 кв.	Ул.Бабушкина 10, секция 1 и 2; ул. Виля Липатова,13; ул.Проезжая,4	
13	ООО СЗ 
«Тантал» 
Сальников Сергей  
Владимирович	672027,
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,
г. ЧИТА,
ул. Нагорная,
д. 26        
ИНН 7536004747	«Многоквартирный  жилой дом с подземной автостоянкой по ул.Кочетккова,56»	Договоры купли-продажи земельных участков.
Кадастровый номер  75:32:030705:823
Площадь 2100 кв.м	№75-32-67-2024 от 07.08.2024 до 07.07..2025, продлено до 07.07.2026	наш дом рф 09.01.2025	3 кв. 2027	Выполнен фундамент.
 Выполнен каркас 16-го этажа и кладка 16-го этажа,. Выполнены штукатурка и стяжка 9-ти этажей.
Работы ведутся.	142 кв. и 27 м/м
/
148 ДДУ/126 кв. и 22 м/м	МЖД по ул. Нагорная 26, 
ул. Кочеткова 53,
ул. Богомягкова, 55,  107,
ул. Анохина, 93, 
Бутина, 78, 
ул. Новобульварная, 38,
ул.Кастринская,9
ЖК в районе 
ул. Усуглинская, 2.
ЖК по ул. Богомягкова-Кочеткова 
ЖК по проспекту Жукова  Тимирязева 23 1 и 2 этап, Новобульварная 40, Кр.Коммунаров,1	
			Многоквартирный  жилой дом с нежилыми помещениями по ул.  Богомягкова,101	Земельный участок в собственности
Кадастровый номер  75:32:030705:824
Площадь 3900 кв.м	№75-32-32-2025 от 6.03.2025 до 6.01.2027	наш дом рф 07.07.2025	4 кв. 2027	Выполнен фундамент.
 Выполнен каркас 15-го этажа и кладка 15-го этажа. Выполнены штукатурка и стяжка 9-ти этажей
Работы ведутся.	174 кв. и 7 н/п

164 ДДУ/157 кв. и 7 н/п		
14	ООО СЗ
 «Ракета»
 Плаксин
 Владимир Александрович	672042,
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,
г. ЧИТА,
ПРОЕЗД ИВАНОВСКИЙ,
д. 10,
пом 15 
ИНН 7536137994	Группа жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 75:32:020141:5 (Дом №9)
адрес: г. Чита, Ангарская,4	Договор аренды земельных участков. 
Срок до 14.11.2030г.
Кадастровый номер  75:32:020141:265
Площадь 2322 кв.м	№75-32-10-2025 от 23.01.2025 до 23.10.2025, 
продлено до 23.10.2026	наш дом рф 10.02.2025	4 кв. 2026	Выполнены:
кирпичная кладка-100%, внутренние перегородки - 100%, кровля - 100%, остекление окон -100%, отопление, вентиляция - 100%, электромонтажные работы-95%, слаботочные сети, пожарная сигнализация - 100%, предчистовая отделка квартир - 100%, чистовая отделка МОПов-40%, лифты - 100%, установка дверей-30%. Работы ведутся.	108 кв./ 
                        79 ДДУ/79 кв.	нет	
			Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Забайкальский край, г.Чита, ул. Нерчинско-Заводская, участок с кадастровым номером 75:32:020141:240,
Адрес: г. Чита, мкр. Квартал Мира,5	Договор аренды земельных участков. 
Срок до 14.11.2030г.
Кадастровый номер  75:32:020141:240
Площадь 2032 кв.м	№75-32-23-2025 от 14.02.2025 до 14.08.2028	наш дом рф 28.05.2025	4 кв. 2026	Выполнены фундамент и работы ниже 0- уровня. 
Устройство кровли - 40%, штукатурка стен - 80%, электрика -60%, сантехнические работы-20%, пожарная сигнализация - 80%, вентиляция - 90%.
 Работы ведутся.	90 кв. 
53 н/п/
 
71 ДДУ/
48 кв. и 23 н/п		
			Группа жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 75:32:020141:5 (Дом №8)
адрес: г. Чита, Нерчинско-Заводская,3	Договор аренды земельных участков. 
Срок до 14.11.2030г.
Кадастровый номер  75:32:020141:264
Площадь 4616 кв.м	№75-32-11-2025 от 23.01.2025 до 23.10.2025, 
продлен до 13.10.2026	наш дом рф 21.02.2025	1 кв. 2027	Выполнено:
тех этаж готовность - 100%, внутренние перегородки - 100%, штукатурка стен-25%, устройство парапетов - 40%, электрика -15%, сантехнические работы-10%, пожарная сигнализация - 20%, вентиляция - 5%, 
Работы ведутся.	195 кв.
111 н/п
/                       122 ДДУ/
98 кв. и 24 н/п		
			Многоквартирный жилой дом №7, расположенный по адресу: Забайкальский край, г.Чита, ул. Нерчин-ско-Заводская, участок с кадастровым номером 75:32:020141:263,
Адрес: г. Чита, мкр. Квар-тал Мира,4	Договор аренды земельных участков. 
Срок до 14.11.2030г.
Кадастровый номер  75:32:020141:263
Площадь 2288 кв.м	№75-32-22-2025 от 14.02.2025 до 14.08.2027	наш дом рф 18.09.2025	2 кв. 2027	Выполнена кирпичная кладка - 6 этажей.
 Работы ведутся.	90 кв.
48 н/п

89 ДДУ/
82 кв. и 7 н/п		
15	ООО СЗ 
«Домостроительный 
комбинат» Бирюков 
Александр Борисович	672015,
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,
Г ЧИТА,
ТРАКТ АГИНСКИЙ,
ВЛД. 25, СТР. 3
ИНН 7500008547	«Жилой комплекс "Серебряный бор" г. Чита 2 этап строительства: жилой дом №1 по ГП 1 очередь строительства в осях 1-4»
Адрес: г.Чита, мкр.Серебрянный бор, д.4	Договор аренды земельного участка б/н от 22.07.2025. Срок до 31.12.2028 г.
Кадастровый номер  75:32:020105:761
Площадь 29 721 кв.м	№75-32-1-2026 от 29.01.2026 до 29.12.2026	наш дом рф 27.02.2026	2 кв. 2027	Выполнен фундамент.  
Ведутся  работы по монтажу цокаля. Монтаж каркаса 1-7 этажа.
Электромонтажные работы - 20% выполнения.
Установка окон на 1-3 этажах. Работы ведутся	124 кв.
1 н/п

0 ДДУ/
0 кв.	ул.Богдана Хмельницкого,14, ул.Богдана Хмельницкого,16	
			«Жилой комплекс «Серебрянный бор» г.Чита: 2 этап строительства,: жилой дом №7 по ГП»
Адрес: г.Чита, мкр.Серебрянный бор, д.7	Договор аренды земельного участка б/н от 22.07.2025. Срок до 31.12.2028 г.
Кадастровый номер  75:32:020105:761
Площадь 29 721 кв.м
	№75-32-100-2025 от 10.10.2025 до 10.10.2028	наш дом рф 7.12.2025	4 кв. 2027	Выполнен фундамент.
Выполнен каркас 1-9 этаж.
Выполнен монтаж полипропилена 1-9 этаж.
Ведутся работы по монтажу теплового узла, монтаж тепловых магистралей.
Монтаж кровли - 90% 
Монтаж фасада - 90% Монтаж   витражей- 75% 
Сантехника - 80%  Электрика - 80% Работы ведутся..	70 кв.

15 ДДУ/ 15 кв.		
			Жилой комплекс «Се-ребрянный бор» г.Чита: 2 этап строительства,: жилой дом №6 по ГП»
Адрес: г.Чита, мкр.Серебрянный бор, д.6	Договор аренды земельного участка б/н от 22.07.2025. Срок до 31.12.2028 г.
Кадастровый номер  75:32:020105:761
Площадь 29 721 кв.м	№75-32-21-2026 от 23.03.2026 до 23.02.2027	наш дом рф 13.05.2026	1 кв. 2027	Ведется монтаж фундаментных блоков.	124 кв. и 2 н/п

0 дду/0 кв.		
			«Жилой комплекс «Се-ребрянный бор» г.Чита: 2 этап строительства,: жилой дом №4 по ГП»
Адрес: мкр.Серебрянный бор,3	Договор аренды земельного участка б/н от 22.07.2025.Срок до 31.12.2028 г.
Кадастровый номер  75:32:020105:761
Площадь 29 721 кв.м	№75-32-80-2025 от 18.08.2025 до 18.08.2027	наш дом рф 27.08.2025	4 кв. 2026	Выполнен фундамент.
Выполнен каркас 1-9 этаж.
Установлены окна 1-9 этаж.
Ведутся отделочные работы. Техническое присоединение выполнено.
Монтаж кровли - 100% выполнения работ
Монтаж фасада - 90% выполнения работ
Монтаж   витражей - 97% выполнения работ
Сантехника - 97% выполнения работ
Электрика - 90% выполнения работ
Лифты - 100% выполнения работ. Работы ведутся	62 кв.
1 н/п

31 ДДУ/ 
31 кв. и 0 н/п 		
16	ООО СЗ «Стройсфера» Будаева Юлия Алексеевна	672039,
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,
г. ЧИТА,
ул.ГАГАРИ-НА,д. 10А,  1
ИНН 7536181947	«Многоквартирный  жи-лой дом по адресу: г. Чита, пер. Парковый, дом 15»	Договор купли-продажи земельного участ-ка от 02.03.2023.
Кадастровый номер  75:32:020124:167
Площадь 2652 кв.м	№75-32-112-2024 от 28.12.2024 до 28.10.2025, продлено 14.10.2025 до 30.11.2026	наш дом рф 28.03.2025	3 кв. 2026	Ведутся работы по сварке лестничных пролетов с 3 по 10 этажи. Произведена укладка напольной плитки в подъезде со 2 по 7 этажи. На крыше установлен сливной лоток. С 1 по 5 этажи осуществляется остекление балконов с северной стороны. Пожарная лестница с 1 по 9 этажи готова. На втором этаже произведена установка 5 дверей. Начаты работы по установки счетчиков горячего и холодного водоснабжения. Установлены конвекторы в двухкомнатных квартирах..	90 кв.
17 н/п

76 ДДУ/ 
72 кв. и  4 н/п	г.Шилка, ул.Балябина,129
г.Чита, пер.Парковый 14	
			«Многэтажный многоквартирный  жилой дом №1 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный на зем.участке с  кадастровым номером  75:32:020317:3 местоположение : г. Чита, п.Антипиха в Ингодинском  АР ГО «Город Чита»» 
Адрес: г.Чита, Аптечный проезд,2	Договор аренды земельного участка от 20.01.2026  №24/26(г.с.)
Кадастровый номер  75:32:020317:116
Площадь 13 563 кв.м	№75-32-22-2026 от 26.03.2026 до 26.11.2027	наш дом рф 30.04.2026	2 кв. 2028	Произведено ограждение всей территории. 
Работы ведутся.	430 кв. и 130 н/п

0 дду/0 кв.		
17	ООО СЗ «Проект-С-47» Боган  Константин Михайлович	672038,
г. ЧИТА,
МКР КАШТАКСКИЙ,
Д. 1,
ПОМЕЩ. 3
ИНН 7500014558	Комплексная застройка мкр. Дальневосточный квартал в границах ул.Ковыльная-Железобетонная на территрории гюЧита, 1 очередь строительства
Корпус 1.1
Адрес: г.Чита, ул.Железобетонная-пер. Зоотехнический	Договор субаренды земельного участка 45/24 от 01.02.2024. 
Срок до 18.01.2034
 Кадастровый номер  75:32:000000:4205
Площадь 42 135 кв.м 
Кадастровый номер  75:32:000000:4233
Площадь 49 580 кв.м	№75-32-877-2024-МБР от 5.08.2024 до 6.08.2027	наш дом рф 12.08.2024	3 кв. 2026	Завершены монолитные работы, кладочные работы, монтаж окон, устройство кровли.
Производены  работы по внутренним сетям:
Отопление, вода и канализация, электрика, монтаж ИТП   1- 17-й  этаж.
Отделка тех. помещений завершена.
Ведутся фасадные и отделочные работы с 1 по 17 этаж. Устройство теплотрассы – завершено. Ведутся работы по водоснабжению и водоотведению.	144 кв. и 6 н/п/

107 ДДУ/106 кв. и 1 н/п	нет	
			Корпус 1.2
Адрес: г.Чита, ул.Железобетонная-пер. Зоотехнический		№75-32-877-2024-МБР от 5.08.2024 до 6.08.2027	наш дом рф 12.08.2024	3 кв. 2026	Завершены монолитные работы, кладочные работы, монтаж окон, устройство кровли.
Производены работы по внутрен-ним сетям:
Отопление, вода и канализация, электрика, монтаж ИТП   1- 17-й  этаж.
Отделка тех. помещений завершена.
Ведутся фасадные и отделочные работы с 1 по 17 этаж. Устройство теплотрассы – завершено. Ведутся работы по водоснабжению и водо-отведению.	144 кв. и 7 н/п
/
79 ДДУ/79 кв.		
			Корпус 1.3
Адрес: г.Чита, ул.Железобетонная-пер. Зоотехнический		№75-32-877-2024-МБР от 5.08.2024 до 6.08.2027	наш дом рф 12.08.2024	3 кв. 2026	Завершены монолитные работы, кладочные работы, монтаж окон, устройство кровли.
Производены работы по внутрен-ним сетям:
Отопление, вода и канализация, электрика, монтаж ИТП  1- 17-й  этаж.
Отделка тех. помещений завершена.
Ведутся фасадные и отделочные работы с 1 по 17 этаж. Устройство теплотрассы – завершено. Ведутся работы по водоснабжению и водо-отведению.	144 кв и 7н/п
./
2 ДДУ/144 кв..		
			Корпус 1.4
Адрес: г.Чита, ул.Железобетонная-пер. Зоотехнический		№75-32-877-2024-МБР от 5.08.2024 до 6.08.2027	наш дом рф 12.08.2024	3 кв. 2026	Завершены монолитные работы, кладочные работы, монтаж окон, устройство кровли.
Производены работы по внутрен-ним сетям:
Отопление, вода и канализация, электрика, монтаж ИТП  1- 17-й  этаж.
Отделка тех. помещений завершена.
Ведутся фасадные и отделочные работы с 1 по 17 этаж. Устройство теплотрассы – завершено. Ведутся работы по водоснабжению и водо-отведению	144 кв. и 6 н/п/

14ДДУ/87 кв.		
			2 очередь строительства
Корпус 2.1
Адрес: г.Чита, ул.Железобетонная-пер. Зоотехнический		№Р057-00154-77/02427740 от 6.06.2025 до 7.07.2027	наш дом рф 11.08.2025	3 кв. 2027	Завершены работы по устройству фундаментной плиты, вертикальных конструкций цокольного этажа, плиты цокольного этажа.
Производятся монолитные работы.	192 кв.
46 н/п

34 ДДУ/ 
34 кв. и 0 н/п		
			2 очередь строительства
Корпус 2.2-2.3
Адрес: г.Чита, ул.Железобетонная-пер. Зоотехнический		№Р057-00154-77/02427740 от 6.06.2025 до 7.07.2027	наш дом рф 11.08.2025	3 кв. 2027	Завершены работы по устройству фундаментной плиты, вертикальных конструкций цокольного этажа, плиты цокольного этажа. 
Производятся монолитные работы.	240 кв.
71 н/п

1 ДДУ/ 
1 кв. и 0 н/п		
			2 очередь строительства
Корпус 2.4
Адрес: г.Чита, ул.Железобетонная-пер. Зоотехнический		№Р057-00154-77/02427740 от 6.06.2025 до 7.07.2027	наш дом рф 11.08.2025	3 кв. 2027	Завершены работы по устройству фундаментной плиты, вертикальных конструкций цокольного этажа, плиты цокольного этажа. 
Производятся монолитные работы .	192 кв.
48 н/п

32 ДДУ/ 
25 кв. и 7 н/п		
18	ООО «СЗ «Основа ДВ» Чудаков Кирилл Юрьевич	672022, Забайкальский край, г Чита, проезд Энергостроителей, д. 10 ИНН 7500013152	Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями общественно-делового, коммерческого назначения и поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная "Жилой дом со встроенными помещениями общественно-делового и коммерческого назначения на первом этаже здания", поз.3.1
Адрес: Чита, пер.4-й Амурский,1	Договор аренды земельного участка № 221/24 от 26.06.2024 до 18.01.2029
Кадастровый номер   75:32:000000:4612
Площадь 5 573 кв.м	№75-32-110-2024 от 25.12.2024 до 25.09.2027	наш дом рф 03.07.2025	3 кв. 2027	Готов фундамент пристроенной части, залита подбетонка основной части здания.
Идет армирование плит фундамента.
	196 кв.
88 н/п

57 ДДУ/ 
57 кв. и 0 н/п	нет	
			 «Жилой дом со встроенными помещениями общественно-делового и коммерческого назначения на первом этаже здания и встроенно-пристроенным поликлиническим учреждением», поз. 2.2-2.3
Адрес: Чита, пер.4-й Амурский,3	Договор аренды земельного участка №222/24 от 26.06.2024, срок до 18.01.2029
Кадастровый номер   75:32:030630:140
Площадь 4 624 кв.м	№75-32-36-2025 от 14.03.2025 до 14.01.2028	наш дом рф 22.09.2025	4 кв. 2027	Подземная часть готова. 
Плита перекрытия первого этажа выполнена на 60%,.
Идет выполнение первого этажа.	196 кв.
50 н/п

10 ДДУ/ 
10 кв. и 0 н/п		
			«Жилой дом со встроенными помещениями общественно-делового и коммерческого назначения на первом этаже здания», поз. 2.1»
Адрес: Чита, пер.4-й Амурский,5	Договор аренды земельного участка №222/24 от 26.06.2024, срок до 18.01.2029
Кадастровый номер    75:32:030630:139
Площадь 6 599 кв.м	№75-32-2-2025 от 14.01.2025 до 14.11.2027	наш дом рф 22.09.2025	3 кв. 2027	Выполнен фундамент.
2 надземных этажа готовность -100%.
Выполняется армирование пилонов 3 этажа.	252 кв.
61 н/п

17 ДДУ/ 
17 кв. и 0 н/п		
19	ООО СЗ «Тантал Инвест» Сальников Сергей Владимирович	672027,
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,
г. ЧИТА,
ул. Нагорная,
д. 26        
ИНН 7536186046	«Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул.Шилова,37»	Договор купли-продажи земельного участка б/н от 1.04.2026
Кадастровый номер     75:32:030651:1672
Площадь 8 000 кв.м	75-32-26-2026 от 30.03.2026 до 30.09.2028	наш дом рф 17.04.2026	4 кв. 2028	1 и 2 секции:
Выполнены колонны, диафрагмы жесткости, наружные стены ниже уровня 0. 
Стяжка подвала – 100%.
Работы ведутся.	312 кв. и 12 н/п

0 дду/0 кв	г. Чита, ул. Красной Звезды, 38г, г. Чита, ул. Красной Звезды, 38д 2-ой этап 1-я и 2-я очередь;. ул.5-я Каштакская, 15Б 3 этап строительства.	
20	ООО «ДВМ-Чита»
 Быстров Сергей Сергеевич	672000, Забай-кальский край, г Чита, ул.Амурская, д. 119 А
 ИНН 7500033744	«Строительство жилого дома по адресу: г. Чита, ул.Генерала Белика», расположенного по адресу: ул. Генерала Белика, д.6, корп.1	Договор субаренды земельного участка б/н от 10.03.2026 сроком до 30.12.2026	№75-32-113-2025 от 12.12.2025 до 12.02.2029	наш дом рф 27.03.2065	1 кв.2029	1 секция: полностью выполнено бетонирование тех.этажа, 1-го этажа.
2 секция: закончены земляные работы в части котлована, залита фундаментная плита.	128 кв. и 1 н/п

0 дду/0 кв.	нет	
ИТОГО	20 застройщиков – 50 объектов капитального строительства 	3985 ДДУ / 3957 кв. и 423 н/п