СОВЕТ ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

17 марта 2025 г. 					          		                    №

пгт. Приаргунск

Об итогах выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Приаргунском муниципальном округе в 2024 году
	
В соответствии с пунктом 9 части 7 статьи 29 Устава Приаргунского муниципального округа, статьей 47 Регламента Совета Приаргунского муниципального округа Забайкальского края утвержденного решением Совета Приаргунского муниципального округа Забайкальского края от 26.12.2022 №334 «О регламенте Совета Приаргунского муниципального округа Забайкальского края», заслушав и обсудив информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края об итогах выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Приаргунском муниципальном округе в 2024 году, Совет Приаргунского муниципального округа Забайкальского края решил:
 
1.	Принять к сведению информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края об итогах выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Приаргунском муниципальном округе в 2024 году.
2.	Рекомендовать депутатам Совета Приаргунского муниципального округа Забайкальского края использовать представленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.
3.	Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Приаргунского муниципального округа Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета
Приаргунского муниципального округа
Забайкальского края                                                                          В.В.Баженова

Отчет о выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в Приаргунском муниципальном округе в 2024 году. 
Мероприятия Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края «Благоустройство дальневосточных дворов»:
Согласно техническому заданию, необходимо было выполнить следующий объем работ: приобретение детского и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, доставка до места производства работ; демонтажные работы; земляные работы; установка бортовых камней; устройство плитных тротуаров; устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части; устройство металлического ограждения; устройство детской и спортивной площадок; устройство освещения; устройство переходных мостиков; вывоз мусора. 
По результатам проведенного открытого конкурса в электронной форме заключен контракт от 29.03.2024 № 1429 – ОК на выполнение работ по благоустройству дворовой территории пгт. Приаргунск, микрорайон МЖК, д.1, 2, 5, в рамках реализации отдельных мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края «Благоустройство дальневосточных дворов» (далее по тексту – Контракт) с ООО «Авангард – Строй» на сумму 7 635 351,35 рублей. 16.04.2024 года подписано дополнительное соглашение об увеличении объема работ пропорционально с увеличением цены Контракта, в результате которого цена заключенного Контракта составила 8 064 343,66 рублей. 
16.04.2024 г, 15.05.2024 г, Подрядчику выплачен аванс в размере 30 % от цены Контракта, что составило 2 419 303,10 рублей. 
Также между Заказчиком и Подрядчиком заключены следующие дополнительные соглашения:
– Дополнительное соглашение № 2 от 17.05.2024 «О поставке товара, технические характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с характеристиками, указанными в Контракте»;
– Дополнительное соглашение № 3 от 17.06.2024 «Об изменении предусмотренных Контрактом объёмов и видов работ, без изменения цены Контракта»;
– Дополнительное соглашение № 4 от 30.08.2024 «Об изменении предусмотренных Контрактом объёмов и видов работ, без изменения цены Контракта»;
– Дополнительное соглашение № 5 от 30.10.2024 «Об изменении предусмотренных Контрактом объёмов и видов работ, без изменения цены Контракта». 
В ходе выполнения работ, комиссией Заказчика неоднократно осуществлялись осмотры объекта, в ходе которых выявлялись нарушения принятых Подрядчиком на себя обязательств, а именно: нарушение сроков выполнения работ. Заказчиком направлялись письма, требования, претензии. Подрядчику направлялось решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, которое было отменено, в связи с предоставлением от Подрядчика документов, подтверждающих устранение замечаний. 
По результатам исполнения Контракта Подрядчиком выполнены следующие работы: приобретение детского и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, доставка до места производства работ; демонтажные работы; земляные работы; установка бортовых камней; устройство плитных тротуаров; устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части; устройство металлического ограждения; устройство детской и спортивной площадок; устройство переходных мостиков; вывоз мусора. 
Работы выполнены в объеме 92,58 % от объема предусмотренного заключенным Контрактом, на общую сумму 7 465 649,73 рублей. 
Объем не выполненных работ составляет 7,42 %, на сумму 598 693,93 рублей (виды невыполненных работ – установка металлического ограждения). 
Работы приняты, оплачены в полном объеме. 
На сложившуюся экономию заключено пять договоров с единственными поставщиками: 
1.	Договор подряда № 1 от 19.04.2024 с ООО «Управляющая компания п. Приаргунск» на выполнение работ по благоустройству дворовой территории пгт. Приаргунск, микрорайон МЖК, д.1, 2, 5. Цена договора составила 565 328,35 рублей;
2.	Договор подряда № 2 от 22.04.2024 с ООО Управляющей компанией «Коммунальные системы» на выполнение работ по благоустройству дворовой территории пгт. Приаргунск, микрорайон МЖК, д.1, 2, 5. Цена договора составила 406 246,77 рублей;
3.	Договор № Д/П б/н от 18.11.2024 с ООО «Авангард – Строй» на поставку секций газонного ограждения. Цена договора составила 285 300,00 рублей;
4.	Договор подряда № 3 от 18.11.2024 г с ИП Саргсян Д.К. на  выполнение работ по благоустройству дворовой территории пгт. Приаргунск, микрорайон МЖК, д.1, 2, 5. Цена договора составила 202 140,54 рублей;
5.	Договор поставки № 19/24 от 13.11.2024 с ИП Приловский А.А. на изготовление и поставку экокашпо в количестве 3-х штук. Цена договора составила 111 253,39 рублей. 
Работы выполнены, приняты и оплачены в полном объеме.
Таким образом, работы по благоустройству дворовой территории пгт. Приаргунск, микрорайон МЖК, д.1, 2, 5, в рамках реализации отдельных мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края «Благоустройство дальневосточных дворов» в 2024 году проведены и оплачены в полном объеме.
В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» выполнено благоустройство общественной территории: площади в пгт. Приаргунск.
Согласно техническому заданию, Подрядчику необходимо выполнить следующий объем работ: приобретение сценического подиума, доставка до места производства работ; демонтажные работы; устройство бортовых камней; устройство тротуарной плитки; устройство асфальтобетонного покрытия площади и дорожки; монтаж сценического подиума; вывоз мусора. 
По результатам проведенного открытого конкурса в электронной форме заключен контракт от 01.04.2024 № 1338 – ОК по благоустройству общественной территории: площади пгт. Приаргунск Забайкальского края с ООО «Авангард – Строй» на сумму 5 625 892,74 рублей. 16.04.2024 года подписано дополнительное соглашение об увеличении объема работ пропорционально с увеличением цены Контракта, в результате которого цена заключенного Контракта составила 5 916 461,63 рублей. 
16.04.2024, 18.04.2024, 14.05.2024, 15.05.2024 г, Подрядчику выплачен аванс в размере 30 % от цены Контракта, что составило 1 774 938,49 рублей. 
Также между Заказчиком и Подрядчиком заключены следующие дополнительные соглашения:
– Дополнительное соглашение № 1 от 16.04.2024 «Об изменении предусмотренного Контрактом объема и видов работ, при этом цена Контракта не изменяется»;
– Дополнительное соглашение № 3 от 17.06.2024 «Об изложении графика производства работ в новой редакции»;
– Дополнительное соглашение № 4 от 02.09.2024 «Об изменении предусмотренных Контрактом объёмов и видов работ, без изменения цены Контракта».
В ходе выполнения работ, комиссией Заказчика неоднократно осуществлялись осмотры объекта, в ходе которых выявлялись нарушения принятых Подрядчиком на себя обязательств, а именно: нарушение сроков выполнения работ. Заказчиком направлялись письма, требования, претензии. Подрядчику направлялось решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, которое было отменено, в связи с предоставлением от Подрядчика документов, подтверждающих устранение замечаний. 
По результатам исполнения Контракта Подрядчиком выполнены следующие работы: приобретение сценического подиума, доставка до места производства работ; демонтажные работы; устройство бортовых камней; устройство тротуарной плитки; устройство асфальтобетонного покрытия площади; монтаж сценического подиума; вывоз мусора. 
Работы выполнены в объеме 100 % от объема предусмотренного заключенным Контрактом, на общую сумму 5 916 461,63 рублей. 
Работы приняты, оплачены в полном объеме. 
На сложившуюся экономию заключено пять договоров с единственными поставщиками: 
6.	Договор подряда № 1/п от 19.04.2024 с ООО «Управляющая компания п. Приаргунск» на выполнение работ по благоустройству общественной территории: площади пгт. Приаргунск Забайкальского края. Цена договора составила 598 789,48 рублей;
7.	Договор подряда № 2/п от 22.04.2024 с ООО Управляющей компанией «Коммунальные системы» на выполнение работ по благоустройству общественной территории: площади пгт. Приаргунск Забайкальского края. Цена договора составила 142 610,11 рублей.
Работы выполнены, приняты и оплачены в полном объеме.
Таким образом, работы по общественной территории: площадки пгт. Приаргунск Забайкальского края в 2024 году проведены и оплачены в полном объеме.
	
В рамках победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, на территории пгт. Приаргунск реализован проект «Благоустройство  парка «Семейная поляна»». 
Администрацией заключен контракт на благоустройство парка «Семейная поляна» с ООО «СИБИНВЕСТКАПИТАЛГРУПП» № 1 от 11.08.2023. Также заключены контракт № 1 от 16.03.2024 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ в рамках выполнения мероприятий проекта (ООО «СтройАвтоэксперт», сумма договора составила 599 000,00 рублей) и договор № 1/02/11/23 от 02.11.2023 (ООО «Мастерская архитектуры и дизайна «ФОКС», сумма договора составила 97 840,00 рублей) на оказание услуг по осуществлению авторского надзора.
Объем финансирования составил 65 млн рублей, в том числе ФБ – 50 миллионов рублей, КБ – 15 миллионов рублей. Срок выполнения работ 01.08.2024 г.
В соответствии с условиями заключенного основного контракта, перечень видов работ, подлежащих к выполнению следующий: устройство пешеходного
фонтана, устройство сцены с амфитеатром, танцплощадки, тихой зоны
отдыха, площадка для скейт-парка, обустройство детской и спортивной
площадок, устройство освещения и видеонаблюдения, озеленение территории, установка малых архитектурных форм, в том числе скамейки, урны, теневые навесы, силуэты, часы, шезлонги, рампы для скейт – парка, детский спортивный комплекс, песочница. 
В соответствии с условиями заключенного контракта, Подрядчику выплачен аванс по контракту в размере 30 % от цены контракта, что составило 19 500 000,00 рублей. 
Оставшаяся цена контракта оплачивалась по факту выполненных работ. 
В ходе выполнения работ, между заказчиком и подрядчиком заключены 4 дополнительных соглашений, об утверждении промежуточных сроков выполнения работ, без переноса срока окончания работ. 
Комиссией заказчика регулярно осуществлялись осмотры объекта, составлялись фотоотчеты. В случае наличия замечаний направлялись информационные письма об их устранении. 
В рамках авторского надзора на рабочей встрече на объекте присутствовал представитель надзора, были сделаны соответствующие записи в журнале работ.
В рамках строительного контроля ответственный специалист принимал участие в рабочих встречах и приемочных комиссиях, о чем имеется соответствующая отметка в актах приемки выполненных работ. 
Таким образом, работы по общественной территории: «Семейная поляна». Благоустройство парка в пгт. Приаргунск Забайкальского края в 2024 году проведены и оплачены в полном объеме.